문서번호	동북권사업과-634
결재일자	2022. 1. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관	발전기획팀장		동북권사업과장		균형발전기획관		균형발전본부장
한승균	이원희		오대중		김승원		01/21 여장권
협 조
	서울아레나팀장					안규홍
	주무관					하선현

서울아레나 연결 수변 전망데크 설치사업

기본계획 수립 용역 시행계획

2022. 1.

균형발전본부

(동북권사업과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더 자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산·제시·분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념·성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

서울아레나 연결 수변 전망데크 설치사업

기본계획 수립 용역 시행계획

서울아레나와 중랑천을 문화적․기능적으로 연계하고, 시민들의 원활한 보행환경과 주변경관 조망을 위하여 중랑천변 오픈스페이스를 확보하는 수변 전망데크 설치를 위한 기본계획 수립 용역을 발주코자 함.

Ⅰ		추진배경 및 추진경위

□ 추진배경

○ 서울아레나 복합문화시설 추진이 가시화됨에 따라, 중랑천과의 문화적․기능적 연계를 위한 주변 정비 필요성 대두

- 서울아레나 이용객 분산을 위해 보차도교량과 연계한 보행데크 설치 검토

○ 중랑천변 수변공간의 상시 활용 및 쉼터 공간 제공, 주변경관을 조망할 수 있는 전망장소로 활용하기 위한 전망데크 및 음악분수 설치 필요

□ 추진경위

○ 행정지원 요청사항(서울아레나 복합문화시설 제3자 제안공고)	: ’19. 9.18.

- 아레나 보행육교를 신설 보차 혼용다리와 연계 요청

○ 창동 일대 교통영향분석 및 교통개선대책 수립 용역	: ’19. 7.~’20. 2.

- 보행친화적 교통환경 조성 : 활성화지역내 중랑천변 보도 확보(창동교~관리사무소)

○ 도봉구청장 요청사항(도봉구→시)	: ’19.11. 6.

- 보도설치구간 추가연장 요청(창동교~자운고등학교 구간)

○ 중랑천변 중심수변공원조성 기본계획 용역	: ’19.12.

- 신규 보행동선 정비를 통한 자연과의 연결 필요

○ 마들로 중랑천변 보행로 조성공사 시행(도봉구)	: ’21. 3.~11.

- 자운고~서울아레나 구간 보행로 조성(폭3~4m, 토공구간 연장 230m)

○ 서울아레나 건축심의 관련 총괄건축가 자문	: ’21. 8.18.

- 중랑천과 서울아레나가 문화적, 기능적으로 연계된 수변문화 창출 아이디어 검토

- 서울의 브랜드 이미지 창출에 서울아레나가 하나의 축이 될 수 있도록 민간과 공공이 상호 전향적으로 협력 필요

○ 서울아레나 건축심의 완료	: ’21. 9.14.

- 서울아레나와 중랑천변을 연결하는 수변 전망데크 설치

○ 서울비전 2030 발표	: ’21. 9.15.

- 신성장 혁신축 조성과 서울 투자청 설립 : 청년첨단 혁신축에 ‘창동’ 포함

○ 수변 전망데크 설치 추진계획 방침 수립(본부장)	: ’21.10. 6.

○ 기술용역 타당성심사 완료(제1145차)	: ’21.10.18.

- 심사결과: 적정(조건부, 용역비 조정 198,860천원)

○ 서울아레나 연결부 설계 관련 내부 검토회의	: ’22. 1.10.

- 서울아레나와 연결부분 설계내용을 감안한 구조물 규모 제안

Ⅱ		용역 시행계획

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 서울아레나 연결 수변 전망데크 설치 기본계획 수립

○ 위    치 : 도봉구 중랑천변 일대(창동교~서울아레나 부지)

○ 규    모

- 아레나 연결 수변 전망데크(폭45m, 연장40m)

- 보행로 정비(폭3m, 연장400m), 음악분수(노즐, 펌프, 조명시설 등)

○ 과업기간 : 착수일로부터 10개월

○ 소요예산 : 198,860천원

- 예산과목 : 균형발전본부 동북권사업과, 도시경제기반형 활성화계획 추진, 도시재생 계획수립(도시개발), 서울아레나 연결 수변 전망데크 설치사업, 시설비 및 부대비, 시설비

○ 주요 과업내용

▶ 전망데크 및 음악분수 국내외 유사사례 조사

▶ 전망데크, 보행로, 음악분수의 구조 형식 검토

▶ 계획도면 및 공사비 산출

▶ 경제적 타당성 검토, 투자심사 자료 작성 등

□ 입찰 세부계획

*******************************

*************************

***********************************************************************

*******************************************************************

○ 선정절차

입찰공고	⇨	입찰등록 및 제안서 제출	⇨	제안서 평가	⇨	협상대상자 선정 및 통보	⇨	협상 및 계약체결

○ 제안서 평가항목 및 배점기준

*******		**********		**		****
*				***
**** ******	****** *****	*****************		*	**	****** **
		******************		*
		******** ***********	****	*
			****	*
		************		*
		*********	****	*
			****	*
	****** *****	**********		*	**	******* **
		****************		**
		*****************		**
		*****************		**
		*********************		**
*******		**********		**	**	******** **

*****************************************************

Ⅲ		향후 계획

□ 행정사항

○ 사전규격 공개(조달청 나라장터)	: ’22. 1.21.~27.

○ 입찰공고 의뢰(→재무과)	: ’22. 1.28.

○ 제안서평가	: ’22. 2.

○ 용역 계약 및 착수	: ’22. 2.

붙임 : 1. 공고문(안) 1부.

2. 과업내용서 1부.

3. 설계내역서 1부.

4. 제안요청서 1부.

5. 기술용역 타당성심사 결과 1부.  끝.