문서번호	총무과-759
결재일자	2022. 1. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	한성백제박물관장
윤수희		임석진	01/21 유병하
협 조
	전시기획과장			김영심
	주무관			권석진

몽촌역사관 전시개편 위한

기본설계 수립 용역 추진

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

한성백제박물관

몽촌역사관 전시개편 위한

기본설계 수립 용역 추진

몽촌역사관 전시개편 위한 기본설계 용역을 추진하고자 함

1	사업 개요

❍ 사 업 명 : 몽촌역사관 전시개편을 위한 기본설계 용역

❍ 사업기간 : 2022년 1월 ***********

❍ 대상공간 : 몽촌역사관 전시공간

구 분		시설 현황
	몽촌역사관	- 전시 면적 : ****** - 전시 구성 : 로비, 상설전시실, 체험전시실 등

❍ 용역내용 : 최적의 전시공간 조성을 위한 리노베이션 설계 용역

❍ 소요예산 : ******************

❍ 추진 근거

- 서울특별시립박물관 관리 및 운영 조례 제1조

- 공약 23. 3D 디지털 문화예술 서비스 구축

2	추진 배경 및 활용 방안

❍ 추진 배경

- 몽촌역사관 개관 30주년을 맞아 변화된 환경에 대응

- 시민의 기대를 충족시킬 수 있는 전시환경 개선 및 콘텐츠 개발 필요

- 그동안 축적된 최신 발굴성과와 연구자료를 전시 콘텐츠에 반영

❍ 추진 경과

- 2021. 8~10월 전시개편 전문가 자문회의 실시(총10회)

- 2021. 9~10월 컨설팅 용역 완료(타당성 검토 및 기본계획 수립)

	용역 결과 개요
서울 2천년 역사를 담은 몽촌토성은 백제의 왕성이자 삼국이 각축을 벌인 역사의 현장으로, 몽촌역사관의 전시는 몽촌토성을 중심으로 재구성하고, 어린이 동반 시민들이 서울의 역사와 몽촌토성의 발굴성과를 친근하게 체험하는 공간으로 설정함. 야외 몽촌토성과 연계하여 전시실은 오픈스페이스와 가변적인 공간 구성을 하고 디지털미디어 위주의 복합화된 다매체 전시연출을 지향하는 리뉴얼을 해야 함. 향후 서울시의 유네스코 세계유산 등재를 위한 기초시설로서 기능할 수 있도록 함

❍ 기본설계 용역 실시 사유

- 몽촌역사관 기본계획의 전시개편 사업 구체화

- 전시 시설 설계 도면 및 정확한 예산 산출 내역 확보로 내실있는 사업 추진

❍ 활용 방안

- 전시개편 기본계획을 기초로 전시실 실감 영상, 디지털 패널 등을 다양하게 활용하는 ‘체험형 디지털 전시’로 개편하는데 참고자료로 활용

- 벽체 철거 등 변화된 기본계획에 맞는 비용 산출 및 합리적인 전시실 관리운영방안을 고려한 설계를 통해, 향후 예산 추경 추진시 활용 및 실시설계 시 참고

3	기본 방향

○ 전시시설 개편 방향 설정 및 디지털 콘텐츠 개발ㆍ도입 구체화

○ 전시기획ㆍ연출ㆍ환경 개선으로 대시민 관람만족도 제고

○ 구역별 기본설계로 도면 및 정확한 비용 산출 추출

○ 몽촌토성과 연계방향 모색

4	세부 사업 내용

○ 전시실 개편방향의 설정 및 디지털 콘텐츠 개발

- 몽촌토성의 발굴성과를 조명하는 유적 박물관으로서의 정체성 강화

- 역사적 의미를 시민에게 쉽게 전달할 수 있고 지속가능한 디지털 콘텐츠 개발

- 기존 유적 박물관과는 차별화된 전시 내용 구상, 보완

○ 전시계획, 전시연출, 환경개선으로 시민만족도 제고

- 전시 콘텐츠가 효과적으로 연결될 수 있는 공간배치 및 전시동선 구성

- 전시주제에 맞는 코너별 연출방향 제시

▸ 유물, 모형, 영상, 그래픽 등 여러 매체의 효과적인 연결과 융합 고려

▸ 모형, 영상, 개별 연출 전시물 등의 기본개념, 재원, 연출방향 등 제시

- 관람객 편의를 위한 편의시설 및 공간 모색

○ 구역별 기본설계 (도면 및 산출내역 추출)

- 전시 진열장, 패널, 영상 등의 모든 전시 시설물 디자인 설계

- 전시 연출을 위한 제반 구조물 설계

- 전시 그래픽 제작 설치(텍스트 패널, 이미지 패널 등)를 위한 설계

- 전시 매체(영상, 모형, 홍보물) 제작 설치를 위한 설계

- 전시관 운영 관련 시설물 설계(공조시스템, 안내판, 소화기 등)

- 상기 기본설계에 따른 세부 비용 산출

▸ 벽체 철거 시 필요한 안전진단비용 산출 등

○ 야외 유적 몽촌토성 등과의 연계방안 모색

- 효과적인 야외 전시 방안 고려

▸ VR, AR 등 가상체험기술 활용 방안

- 몽촌토성·한성백제박물관과 연계한 종합안내 계획의 기초자료 마련

▸ 국내외 유적 박물관 사례를 종합적으로 분석하여 바람직한 방향 제시

○ 보고회 3회(착수, 중간, 최종보고회) 및 전문가 자문 실시

- 사업 진행 과정에서 3차례의 보고회를 통해, 각 공정별 전문가 자문을 반영하여 사업의 완성도 제고

5	소요 예산 및 집행 방법

❍ 소요 예산 : *********************

❍ 예산 과목 : 한성백제박물관, 선사ㆍ고대역사문화공간창조, 박물관운영활성화, 상설전시실유지운영, 일반운영비, 사무관리비(100-201-01)

❍ 집행 방법

- 몽촌역사관 전시개편 기본설계 용역 : 수의계약

※ 수의계약사유 : 박물관 상설전시 개편 전시기획 경험이 많은 전문업체, 2천만원이하 소액 용역

※ 근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항의 4 및 5호

❍ 업체 선정

****************************

***************************************

***********************************

**************************************

- 도면은 CAD 및 PDF 형식으로 제출

- 그 외 이미지는 해당형식에 맞는 이미지파일 및 AI 파일 형식으로 제출

6	향후 추진일정

❍ 2022. 1. ~ 3.   : 기본설계 용역 수행(전문가 자문 3회 실시 예정)

❍ 2022. 4. ~ 6.   : 예산 확보  ※ 1차 추경 추진

❍ 2022. 7. ~ 12.  : 시공업체 선정, 전시공사 실시, 재개관

붙임 1. 전시총괄 연출표(안) 1부.

2. 기본설계 용역 결과물 목차(안) 1부.  끝.