문서번호	도시철도토목부-860
결재일자	2022. 1. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목2과장	도시철도토목부장
장대성		권순환	01/24 최병훈
협조
	주무관		김봉성

『진접선(4호선연장) 차량기지 1공구 건설공사』

건설사업관리용역 설계변경 검토 보고(총괄 4회)

2022. 1.

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

「진접선(4호선연장) 차량기지 1공구 건설공사」

건설사업관리용역 설계변경 검토보고(총괄 4회)

『진접선(4호선연장) 차량기지 1공구 건설공사』건설사업관리용역 투입계획 변경에 따른 설계변경(총괄4회) 검토보고임.

□ 관련근거

○「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」제14장 용역계약 일반조건 제6절(과업내용의 변경과 계약금액의 조정)

○「건설사업관리용역 과업수행계획서」4.2 특별사항

○「진접선(4호선연장) 공사장 안전관리 강화계획(본부장 방침, ’21.11.18)」

□ 용역개요

○ 계 약 명 : 진접선(4호선연장) 차량기지 1공구(인입선) 건설공사

감독권한대행 등 건설사업관리용역

○ 계 약 자 : *************************

○ 계약기간 : ’18.12.1.~ ’24.10.31.(3차 : ’21. 1. 1. ~ ’22. 2. 2.)

○ 계약금액 : ***********************************

○ 계약현황                                           (단위 : 천원)

******	****	******	******	******	****
*****	*********	*******	*******	*******	*********
****	*********************	*********************	*********************	*********************

□ 추진경위

○ ‘18.10.12. : 계약(착수 ’19.1.16.)

○ ‘19.12.31. : 1차 용역 준공

○ ‘20.12.07. : 총괄1회 변경(물가변동 7.58%)

○ ‘20.12.31. : 2차 용역 준공

○ ‘21.11.15. : 총괄2회 변경(물가변동 3.43%)

○ ‘21.11.18. : 공사장 안전관리 강화 계획(본부장 방침)

○ ‘21.12.15. : 총괄3회(안전감리원 추가투입)

□ 설계변경 내용

○ 변경 사유

- 효율적인 공사관리를 위한 건설사업기술인 투입계획 조정

○ 투입계획 조정내용

- 건설사업관리 계약금액 내에서 건설사업관리기술인 등급 및 투입인원 조정

****	*****		*****		*********
	**	***	**	***
**** *********	**	******************* *******************	**	*******************	*******
			**	*******************
*** *********	**	******************* *******************	**	*******************	*******
			**	*******************
			**	*******************
*** *********	**	*******************	**	*******************	*******
*** *********	**	*******************	**	*	******* *****
******* *********	**	*******************	**	*******************	******
			**	*******************
*******	**	*******************	**	*******************	******

○ 계약변경 내용                                        (단위 : 천원)

구 분		당 초	변 경	증 · 감	비 고
** ****	****	*********	*********	******
	****	*******************	*******************	******

□ 건설사업관리용역사업자 검토의견

○ 당초 계약상 토목분야 건설사업관리기술인의 투입 공백기간 발생으로 업무수행에 지장이 예상되어 기 투입된 건설사업관리기술인 투입기간 등을 변경코자 하며,

○ 원활한 건설사업관리를 위해 공백기간 없이 용역 준공시 까지 등급조정 포함하여 투입기간을 변경하고자 함.

□ 조치계획

○ 계약금액 및 계약기간에 변경이 없는 투입계획 변경과 관련된 사항으로서 건설사업관리용역사업자의 계약변경 요청이 적정한 것으로 판단되므로 설계변경(총괄4회) 시행코져 함.

붙임  1. 건설사업관리용역사업자 요청 공문(검토의견서 포함) 1부.

2. 설계변경 내역서(총괄4회) 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

【별첨#1】건설사업관리기술인 변경 투입 현황

❍ 건설사업관리기술인 투입계획 조정 현황                           (금액단위:천원)

****			***	***	*********	****************
** **	*******		*********	*********	*	*****
	*******		********** *********	********** *********	*	*****
	* * * *	******** *****	**************** **************	**************** **************	******* ***	*********** ************************* ***********************
		******** *****	**************** **************	**************** **************	******** ***	************ ************************* ******************************
		******** *****	**************** **************	**************** **************	******* ***	************ ************************* ****************
		******** *****	**************** **************	*********** **********	******* ***	************ *************************** ************
		***********	**************** **************	**************** **************	******* ***	************ ************************* ********************
		******** ***	**************** **************	**************** **************	*	*****
		***	***************	***************	*	*****

❍ 건설사업관리기술인 투입계획 변경 현황

			특급				고급				중급				초급

구 분		2018년												2019년												2020년												2021년												2022년												2023년												2024년										비 고
		2		4		6		8		10		12		2		4		6		8		10		12		2		4		6		8		10		12		2		4		6		8		10		12		2		4		6		8		10		12		2		4		6		8		10		12		2		4		6		8		10
*****	**														**																																																																	**				****** ******
	**														**																																																							**
*****	**														**																																																														**							****** ******
	**														**																																					**																**
*****	**																												**																																																							****** ******
	**																												**
*****	**																																																																			**																*
	**
*****	**																																																	**																																		****** ******
	**																																																	**		**