문서번호	설비부-980
결재일자	2022. 1. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로설비과장	설비부장
박근형		문학준	01/24 김호성
협조

『제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 전기공사』

물가변동으로 인한 계약금액 조정(2회) 검토보고

2022. 1.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 전기공사』

물가변동으로 인한 계약금액 조정(2회) 검토보고

우리 본부에서 추진하고 있는『제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 전기공사』관련, 계약상대자로부터 물가변동으로 의한 계약금액 조정(2회) 요청이 있어 물가변동 금액 적정 여부를 검토 보고 드림.

Ⅰ		관련근거

○ 지방계약법 제22조(물가변동 등에 따른 계약금액의 조정)

○ 공사계약 일반조건 제22조(물가변동으로 인한 계약금액의 조정)

○ 물가변동으로 인한 계약금액 조정(2회) 검토 보고[제2자유입건 제2022-14호('22.01.19.)]

Ⅱ		공사개요

○ 공 사 명 : 제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 전기공사

○ 위    치 : 마포구 상암동 월드컵 교차로 일대

○ 규    모 : 지하차도 신설(L=540m), 도로확폭(L=582m)

○ 계약기간 : *************************

○ 계약금액 : **************

○ 시 공 사 : *****

○ 건설사업관리단 : ***********************

○ 계약현황

계약건명	차수	계약기간	계약금액(원)	비고
****	**	***********************	*************
	**	***********************	***********
	**	***********************	***********

Ⅲ		검토내용

○ 물가변동(ESC)으로 인한 계약금액 조정 충족 요건

- 계약체결일로부터 90일 이상 경과

- 물가변동 지수조정률이 100분의 3이상 증감된 경우

○ 물가변동(ESC) 조정 조건 충족 여부

구 분	제2회	충족여부	비 고
****	****	**	******
**** **********	***********	**	******
**** *******	***********
****	****
******	****	**	*****

○ 계약금액 조정(제2회) 세부검토 내용

구 분		금 액	비 고
물가변동 대상금액의 계약금액(A)		***************
물가변동 적용제외 금액(B)		************
물가변동 조정기준일 현재공정률	예정공정률	******
	실행공정률	******
	기성공정률	******
	제외공정률	******
물가변동 적용대가(C)		**************	C=A-B
물가변동 조정률(D)		****	지수조정률 산출표 참조
물가변동 등락대상 조정금액(E)		***********	E=C*D
선급금 공제금액(F)		**	선금 지급 없음
물가변동 조정 적용금액		***********

○ 계약금액 조정 금액                                        (단위 : 원)

차 수	계약금액	조정금액	증·감액	비 고
총 차	*************	*************	*************
1 차	***********	*	*
2 차	***********	***********	*************

○ 건설사업관리인 검토의견

- 상기와 같이 물가변동으로 인한 계약금액 조정 내역을 검토한 결과, 물가 변동 조정 경과기간이 기준시점 일로부터 90일 이상(210일) 경과하고,

- 지수조정률이 100분의 3이상(3.2%) 증가 되어 관련 규정에 의거 상기와 같이 물가변동 조정금액으로 정함이 타당하다고 사료됨.

Ⅳ		보고자의견

○『제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 전기공사』관련 건설사업관리기술단의 물가변동으로 인한 계약금액 조정(제2회) 실정보고 내용이 적정하다고 판단되어 승인하고, 계약금액 조정 사항을 계약부서(총무부)에 변경 계약 의뢰하고자 함.

붙임  물가변동으로 인한 계약금액 조정(제2회) 보고 1부.  끝.