문서번호	생태환경과-238
결재일자	2022. 1. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		생태환경과장	공원부장
양지정		이성일	01/24 김상국
협조

【 망원한강공원 자연형 호안 복원사업 】

소규모환경영향평가용역 추진계획

2022.  1.

한강사업본부

(생태환경과)

- 망원한강공원 자연형 호안 복원사업 -

소규모환경영향평가용역 추진 계획

「망원한강공원 자연형 호안 복원사업」추진에 따른 소규모 환경영향평가용역을 시행하여 사업구간 내 환경에 끼치는 악영향 등에 대한 저감방안 및 환경보전대책을 수립하고 이에 따른 대안 등을 제시하고자 용역을 시행하고자 함.

Ⅰ				추진근거

❍ 2022년 자연형호안 복원사업 추진계획(생태환경과-158호,‘22.1.14.)

❍ 환경영향평가법 제43조(소규모 환경영향평가의 대상)

Ⅱ				용역개요

❍ 용 역 명 : 망원한강공원 자연형호안 복원사업 소규모 환경영향평가용역

❍ 용역기간 : 2022.03.∼08월(착수일로부터 180일)

❍ 과업내용

- 사업의 개요

- 지역개황

- 대상사업의 지역적 범위 및 대상 지역 주변 지역에 대한 토지이용 현황

- 입지의 타당성

- 환경 현황, 환경에 미치는 영향의 조사 등

- 예측·평가 및 환경보전방안 등 제시

- 종합평가 및 보고서 작성 등

Ⅲ				소요예산

❍ 예    산 : 49,500천원(2022년 예산)

❍ 예산과목

- 한강공원 이용 및 생태환경 개선, 한강 자연성 회복, 자연(형)호안 복원, 시설비 및 부대비, 시설비(401-01)

Ⅳ				추진계획

❍ 2022.01. : 기술용역타당성 심사 의뢰

❍ 2022.02. : 소규모환경영향평가용역 발주

❍ 2022.03. : 용역 착수

❍ 2022.07. : 소규모환경영향평가 협의(서울지방국토관리청, 한강유역환경청)

❍ 2022.08. : 소규모환경영향평가 협의 완료 및 용역 준공

붙임 : 1. 설계내역서  1부.

2. 과업내용서  1부.

3. 위치도  1부.  끝.