문서번호	현장민원과-1083
결재일자	2022. 1. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	현장민원과장	강동수도사업소장
권영기	송정자	01/25 김명용
협 조
	행정지원과장		최광운
	요금과장		김종은
	급수운영과장		김종원
	시설관리과장		이규희
	행정관리팀장		김덕기
	수질팀장		손용문
	주무관		곽민지

2022년

주택 내 녹에 취약한 급수관 교체 추진계획

2022.  1. 24.(월)

강동수도사업소

(현장민원과)

2022년 주택 내 녹에 취약한 급수관 교체 추진계획

깨끗한 아리수의 수질에 크게 영향을 미치고 있는 주택의 노후 수도관 교체를 적극 지원하여 시민들이 안심하고 마실 수 있는 환경 조성

Ⅰ		관련근거

□ 수도법 제21조(주택 내 급수관의 교체갱생 공사비의 보조 근거)

□ 수도조례 제40조, 수도조례 시행규칙 제43조(공사비 보조 대상, 금액등의 규정)

□ 2022년도 주택 내 녹에 취약한 급수관 교체 지원 추진계획(급수설비과-349)

Ⅱ		추진방향

□ 2022년 추진 목표: 5,200가구 교체(사업비: 3,110백만원)

□ 주택 내 녹에 취약한 급수관 교체 활성화를 위한 홍보 강화

○ 주택 내 녹에 취약한 급수관 교체 공사비 지원 안내문 배포

○ 공용급수관 교체 대상 아파트 개별 방문 홍보 등

▣ 본부 추진 계획

- 2022년 교체 지원 계획(27,517가구, 사업비 16,294백만원)

- 교체 전후 설문조사 및 수질검사 실시(22. 3. ~ 10.)

- 홍보강화 추진

· 주민밀착형 홍보 추진, 자치구 및 지역소상공인 협력을 통한 홍보 등

- 기간변경: (당초 2007년 ~ 2022년 → 변경 2007년 ~ 2025년)

· 2023년 이후 잔여대상에 대하여 3개년 연차별 지원으로 목표달성 추진

구분	사업목표	‘07~’21년 추진실적	연도별 추진계획
			소 계	’22년	’23년	’24년	’25년
가구수	565,000	495,746	69,254	27,517	17,000	14,000	10,737
소요예산 (억원)	2,550	1,932	618	163	185	153	117

Ⅲ		사업개요

□ 사업기간 : 2007년 ~ 2025년

○ 2023년 이후 잔여대상에 대하여 3개년 연차별 지원으로 목표달성 추진

□ 사업규모 : 54,450가구 (기교체 44,574가구 지원)

○ 2007년~2021년 : 44,574가구(81.86%)

○ 2022년 이후 연도별 추진계획

구 분	합 계	기 교체 (’07년~’21년)	22년 이후 추진
			소 계	’22년	’23년 이후
합 계	54,450	44,574	9,876	5,200	4,676
공용배관	29,553	24,463	5,090	4,800	290
세대배관	24,897	20,111	4,786	400	4,386

2021년 추진 실적

구 분	계		세대배관		공용배관		비고
	지원수	금액(천원)	지원수	금액(천원)	지원수	금액(천원)
계	1,247	756,857	378	267,657	869	489,200
아파트	1,042	636,796	199	157,996	843	478,800
연립주택	1	770	1	770	-	-
다세대주택	86	56,341	60	45,941	26	10,400
다가구주택	116	60,770	116	60,770	-	-
단독주택	2	2,180	2	2,180	-	-

□ 2022년 교체 추진계획

○ 교체 목표 및 예산 : 5,200가구(3,110백만원)

교체가구			배정예산	비고
계	공용배관	세대배관
5,200	4,800	400	3,110	사무비 5백만원

○ 공용배관 교체 목표 : 4,800가구(2,819백만원)

연번	아파트명	난방방식	세대수	소요예산 (백만원)
계			4,800	2,819
1	****	****	***	***
2	******	****	*****	*****

Ⅳ		세부 추진계획

□ 공용급수관 교체 공사 수요조사

○ 공용급수관 교체 계획이 있는 아파트 공문 제출요청(사업소⟶관리사무소)

연번	아파트명	난방방식	세대수	소요예산 (백만원)	진행상황
1	****	****	***	***	*****
2	******	****	*****	*****	********
3	*******	****	*****	*****	********
계			8,730	5,177

*****************************************

*************************************************

□ 옥내 급수관 개량지원 심의위원회 구성·운영

○ 심의위원회 구성

- 위원구성: 사업소장(위원장), 5개 부서장, 담당주무관(간사)

- 회의의결: 재적위원 과반수 출석과 출석위원 과반수의 찬성

○ 주요 의결사항

- 신청자가 많을 경우 공사비 지원 우선순위 결정

- 공익상 시장이 필요하다고 인정되는 경우에 대한 결정

- 전액지원(사회복지시설) 및 견적금액 3천만원 이상 공사 승인 결정

- 기타 심의위원회의 결정이 필요한 사안

□ 공사비 지원 안내문 배포 및 홍보

○ 유관기관(구청, 동주민센터) 및 수도사업소: 5,000매

- 관내 2개 구청(강동구, 송파구)     : 300매(구청별 150매)

- 46개 동 주민센터 안내문 비치  : 4,140매(동별 90매)

- 수도사업소 민원실 및 각 과 비치: 200매, 각 과 비치 360매(과별 70매)

○ 각종 현장민원 처리 시 안내 홍보

- 아리수 품질확인제 수질검사, 급수불편, 옥내누수진단 등

○ 주택 내 녹에 취약한 급수관 교체 공사비 지원 안내문 우편 발송

- 아파트 관리사무소에 협조 공문 및 안내문 발송 (관리사무소 → 각 세대별 안내)

- 지역소상공인(관내 설비업체, 부동산 중개소)에 협조 공문 및 안내문 발송

○ 공용급수관 교체대상 아파트 개별방문 홍보 (2월 ~12월)

□ 자치구, 지역 언론 등 홍보매체 활용 홍보

○ 홍보매체: 구정소식지, 구청 홈페이지, 동 주민센터 안내판 등

○ 홍보내용: 노후 옥내급수관 교체 공사비 지원 안내

○ 추진방법: 홍보문안 작성하여 자치구, 동 주민센터에 홍보 협조 의뢰

□ 아리수 품질확인제 조사원 활용 홍보

○ 목    적: 노후 옥내급수관 수질검사 병행하여 교체 유도

○ 기    간: 2022. 3.~10.

○ 추진방법: 아리수 품질확인제 조사원 활용 수질검사 실시와 병행하여 옥내급수관 교체 지원 홍보

□ 교체 전․후 수질검사 및 설문조사 실시(행정지원과 수질팀)

○ 대  상: 주택 내 녹에 취약한 급수관 교체 지원 가구

○ 기  간: 2022. 3.~10.(8개월)

○ 설문조사방법: 아리수 품질확인제 기간제노동자가 설문조사

- 아리수 품질확인제 점검결과와 병행하여 설문조사표 작성

Ⅴ		행정사항

□ 급수관 교체 지원 사업 홍보 및 실적 보고

○ 교체 공사비 지원사업 홍보 및 승인(매월)

○ 교체 지원 실적 보고(매월)

- 월보(지리정보시스템 완성 이후), 수질검사 및 설문조사

□ 교체 지원사업 홍보 협조: 행정지원과

○ 교체 전·후 수질검사 및 설문조사 이행 철저

- 옥내급수관 교체 지원 가구에 대한 수질검사 및 음용실태 설문조사표를 매월말까지 현장민원과로 통보

○ ‘찾아가는 1일 현장수도사업소 운영’ 시 홍보

○ 아리수 음용률 향상 등 홍보시 노후 옥내급수관 교체 홍보 중점 추진

붙임  1. 주택 내 녹에 취약한 급수관 교체 지원 안내문 1부.

2. 설문조사표 1부.  끝.