문서번호	클라우드센터운영과-631
결재일자	2022. 1. 25.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		클라우드센터운영과장	데이터센터소장
이재승		하동수	01/25 추경수
협 조	빅데이터담당관			이수재
	교통정보과장			이수진
	세입총괄팀장			김형일
	공원시설과장			양돈욱
	정보자원운영과장			김성국
	에스플렉스센터운영과장			여인선
	주무관			박종순

클라우드센터 증축 전기공사 관련 -

전원 이중화 점검 및 UPS 전원 차단 계획

2022. 1.

서울시데이터센터

(클라우드센터운영과)

클라우드센터 증축 전기공사 관련 -

전원 이중화 점검 및 UPS 전원 차단 계획

클라우드센터 19층 A시스템실 전기공사 공정 중 기존 운영중인 UPS 전원에 신규 장비 연결 작업이 필요하여, 클라우드센터 운영 장비 전원 이중화 사전 점검 및 보완 조치 후 UPS 이중 라인을 순차적으로 차단 및 장비 연결하여 안정적인 시스템실 운영환경을 마련하고자 함

1		개 요

□  작업 개요

*************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

***********************************************************************************************

*************************************************************************************************************************

***********************************************************************************

□  대상 장비 : 총861대

구분	계	전산장비	정보통신	정보보호	기반시설
총계	861	390	218	107	146
상암 관리	777	356	178	97	146
타부서 관리	84	34	40	10	0

□  작업일정 : 2022. 2. 24.(목) 20:00 ~ 25.(금) 02:00

❍ 사전 작업                     : 1. 26.(수) ~ 2. 23.(수)

*****************************************

❍ UPS 전원 절체 작업          : 2. 24.(목) 20:00~25.(금) 02:00

□ 작업방법

❍ 사전 전원 이중화 점검

********************************************

**************************************************************

□ UPS 전원 절체 작업

****************************************************

*************************************************

*************************************************

2		세부 추진계획

□  대상장비 : 총861식

❍ 클라우드센터운영과 대상 : 교통정보, 버스정보 등 777대

❍ 타기관 관리 대상 : 녹색교통, C-ITS, 빅데이터저장소, e-TAX 등 84대

□  작업일정 : 2022. 2. 24.(목) 20:00 ~ 25.(금) 02:00

□ 작 업 자

❍ 클라우드센터운영과 대상 : 클라우드센터운영과 운영사업자 인력 및 담당자

❍ 타기관 관리 대상 : 각 기관별 운영사업자 인력 및 담당자

□ 사전 작업

❍ 일정 : 1. 26.(수) ~ 2. 23.(수)

❍ 클라우드센터운영과 관리 장비

***********************************

*******************************************************

❍ 타기관 운영 장비

****************************************************

*******************************

***************************************************

□ UPS 전원 절체 작업

❍ 일정 : 2.24.(목) 20:00 ~ 25.(금) 02:00

*****************************************************************

❍ 세부 작업절차

***********************************

************************************************

***********************************

***********************************

************************************************

***********************************

❍ 서비스 모니터링 : 2.24(목) 20:00 ~

□ 클라우드센터 전원 구성(붙임 참조)

3		행정사항

□ 전원 절체 작업 시 업무부서 서비스 확인

❍ 대상장비

**************

․********************************************************************************************************************************************************************************************************

*****************

․********************************************************************************************************************************************************************************************************************

***********

․****************************************************************************************

❍ 업무부서

- 교통정보과, 주차계획과, 교통정책과, 택시정책과, 버스정책과, 뉴미디어담당관, 빅데이터담당관, 상수도사업본부(요금제도과, 전산정보과, 홍보과, 민원분석과, 기전설비과, 공간정보과, 계측관리과, 급수운영과, 서울물연구원), 시민봉사담당관, 역사박물관 시설과, 세무과,  한강사업본부, 정보자원운영과

***********************************************

□ 기관 자체 관리 장비 사전 전원 이중화 점검·보완 및 UPS 전원 절체 작업 당일 서비스 정상 여부 확인

❍ 대상장비

- ************************************************************************************************

※ 전용회선 및 VPN 등 타기관 자료 전송 구간 세부 점검 필요

❍ 협조부서 : 교통정보과, 세무과, 빅데이터당당관, 한강사업본부, 정보자원운영과

❍ 협조사항

************************************

************************************************

□ 클라우드센터 UPS 장비 정전 작업 지원

❍ 대상장비 : ******************************************

❍ 협조부서 : 에스플렉스센터운영과

❍ 협조사항 : *******************************

4		향후 계획

□ 각 기관별 전원 이중화 점검 및 보완 대책 마련과 전원 중단 당일 장애 지원 관련 협조 공문 발송

□ 작업 당일 서비스 순단 발생 등 작업 내용 대시민 공지

붙임 : 클라우드센터 전원 이중화 구성도 1부.  끝.