문서번호	도시철도토목부-909
결재일자	2022. 1. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목2과장	도시철도토목부장
장대성		권순환	01/25 최병훈
협조
	주무관		김봉성

『진접선(4호선연장) 차량기지 1공구 건설공사』

건설사업관리용역 발주계획 검토보고(4차)

2022. 1.

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

『진접선(4호선연장) 차량기지 1공구 건설공사』

건설사업관리용역 발주계획 검토보고(4차)

『진접선(4호선 연장) 차량기지 1공구 건설공사』건설사업관리용역 4차 발주계획에 대한 검토 보고임.

※ ㈜동명기술공단 동기공 제2022-0353호(‘22.1.24.)

□ 용역개요

○ 계 약 명 : 진접선(4호선연장) 차량기지 1공구(인입선) 건설공사

감독권한대행 등 건설사업관리용역

○ 계 약 자 : *************************

○ 계약기간 : ’18.12.1.~ ’24.10.31.(3차 : ’21. 1. 1. ~ ’22. 2. 2.)

○ 계약금액 : ***********************************

○ 계약현황                                          (단위 : 천원)

구 분	계 약 기 간	계약금액	비 고
총 괄	2018.12.01. ~ 2024.10.31.	*********
1 차	2019.01.16. ~ 2019.12.31.	*******
2 차	2020.01.01. ~ 2020.12.31.	*******
3 차	2021.01.01. ~ 2022.02.02.	*******	준공예정
4 차	2022.02.03. ~ 2022.12.31.	*******	금회발주
장 래	-	*********

□ 추진경위

○ ‘18.10.12. : 계약(착수 ’19.1.16.)

○ ‘19.12.31. : 1차 용역 준공

○ ‘20.12.07. : 총괄1회 변경(물가변동 7.58%)

○ ‘20.12.31. : 2차 용역 준공

○ ‘21.11.15. : 총괄2회 변경(물가변동 3.43%)

○ ‘21.11.18. : 공사장 안전관리 강화 계획(본부장 방침)

○ ‘21.12.15. : 총괄3회(안전감리원 추가투입)

□ 보고내용

○ 건설사업관리용역 4차 발주 현황

- 용역 기간 : 2022. 2. 3. ~ 2022. 12. 31.

- 발주 내역

(단위 : 천원)

구 분	총 용역비	공급가액	부가가치세	손해배상보험료
용역비(4차)	*******	*******	******	******

- 투입 인원

구 분	계(인․월)	실투입 인원	비 고
상주 건설사업관리기술자	38.46	4명	특급1, 중급2, 초급1
기술지원 건설사업관리기술자	9.62	5개 분야	상주인원의 20%
계	48.08

□ 조치계획

○ 상기 보고내용과 같이「진접선(4호선연장) 차량기지 1공구 건설공사」건설사업관리용역의 원활한 추진을 위해 4차분 용역을 발주코져 함.

(단위 : 천원)

구 분	계 약 기 간	계약금액	비 고
4차	2022. 2. 3. ~ 2022. 12. 31.	*******

※ 예산과목 : 도시철도건설, 도시철도건설사업, 진접선(4호선 연장)차량기지건설, 시설비 및 부대비, 감리비

붙임  관련공문 1부.  끝.