문서번호	건축부-1492
결재일자	2022. 1. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	건축관리과장	건축부장
문성수	代한영석	01/26 代차무흥
협 조	물재생기획팀장		조장환
	주무관		송석범
	주무관		이창근
	주무관		박성수
	주무관		최진규

「청계하수역사체험관 건립」

설계 및 소방설계용역 계약기간 연장 검토보고

2022. 1.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

「청계하수역사체험관 건립」

설계 및 소방설계용역 계약기간 연장 검토보고

「청계하수역사체험관 건립」설계 및 소방설계용역과 관련하여 용역기간 연장이 요청되어 검토 후 그 결과를 보고 드림.

1		용역개요

❍ 용 역 명 : 청계하수역사체험관 건립 설계용역 및 소방설계용역

❍ 위    치 : 서울특별시 성동구 용답동 250-19 일대 (중랑물재생센터 내)

❍ 규    모

- 증    축 : 지상1층, 연면적 175㎡

- 리모델링 : 지하1층/지상1층, 연면적 984㎡(유입펌프장), 유입관로( 2.4m×2.4m, L=250m)

❍ 주요시설 : 전시체험실, 방문자센터 등

❍ 계 약 자

**	*********	*****
****	***********************	***********************
****	**********************	********************

2		추진경위

❍ ´20.07. : 설계공모 공고 (당선작발표 : ’20.10.22.)

❍ ´20.12. : 설계자 선정 및 기본설계 착수 (기본설계감독 : 물재생시설과)

❍ ´21.08. : 기본설계완료 및 실시설계 감독의뢰 (물재생시설과 → 도시기반시설본부)

❍ ´21.09. : 서울시 경관위원회 심의 (조건부 승인)

❍ ´21.10. : 소방설계용역사 선정 및 통보 (물재생시설과 → 도시기반시설본부)

※ 물재생시설과에서 소방설계용역을 별도 계약

❍ ´21.11. : 설계단계 방수자문위원회 개최 (건축부 주관)

❍ ´22.01. : 실시설계자문위원회 구성 및 개최 (서면자문)

3		용역기간 연장내용

❍ 관련근거

- 지방자치단체입찰 및 계약집행기준 제14장 용역계약일반조건 제7절 제2조

- 청계하수역사체험관 조성 설계용역 과업기간 연장요청 건(20220124, ’22.01.24.)

- 청계하수역사체험관 건립 (소방)설계용역 계약기간 연장요청[하나 제22-042, ’22.01.24.]

❍ 용역기간 연장

************************

***	****	****	***
****	************	************		****
****	*********************	*********************	**	***

**********************

***	****	****	***
****	**********	**********		****
****	*********************	*********************	**	***

***************

***************************************

*******************************************

******************************************

4		처리의견

❍ 해당 내용에 대하여 승인하여 설계용역 및 소방설계용역 변경 계약을 추진하고자 함.

5		행정사항

❍ 향후계획

- ´22.01월   : 변경계약 요청 (건축부 → 총무부)

- ´22.03.16. : 설계 및 소방설계용역 준공

붙임  1. 설계용역 과업기간 연장요청 공문 1부.

2. 소방설계용역 과업기간 연장요청 공문 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.