문서번호	급수운영과-1736
결재일자	2022. 1. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장	동부수도사업소장
정석균	권기섭	유동수	01/27 이재호
협 조
	시설관리과장		송병욱
	시설관리팀장		유광창

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다.”

『2022년 대현산배수지 등 6개소』

정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역 추진 계획

2022. 1.

동부수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『2022년 대현산배수지 등 6개소』

정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역 추진 계획

『시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법』에 의거 2022년 대현산배수지 등 6개소에 대한 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역 추진 계획을 보고 드림

※ 기술심사담당관-10271(2021. 7. 1.) ‘기술용역 타당성 심사 결과 통보’

1		관련 규정

□ 추진 근거(시설물안전법 제11조 및 제12조)

구분	정밀안전진단	정밀안전점검
법적 조항	• 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제12조(정밀안전진단의 실시)	• 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제11조(안전점검의 실시)
대상 시설	• 1종 시설물	• 1, 2종 시설물

□ 대상 시설물(시설물안전법 시행령 제4조 관련 별표1)

구분	1종시설물	2종시설물	종외 시설물
대상	• 1일 공급능력 3만톤 이상의 지방상수도	• 1일 공급능력 3만톤 미만의 지방상수도	• 배수관로 • 급수시설
	수원지시설, 도･송수관로, 취수시설, 취･정수장, 배수지, 아리수올림터

□ 실시 주기(시설물안전법 시행령 제8조 2항 및 제10조 1항 관련 별표3)

안전 등급	정밀안전진단	정밀안전점검
		건축물	그 외 시설물
A등급	6년에 1회 이상	4년에 1회 이상	3년에 1회 이상
B･C등급	5년에 1회 이상	3년에 1회 이상	2년에 1회 이상
D･E등급	4년에 1회 이상	2년에 1회 이상	1년에 1회 이상

❍ 배수지･올림터 진단 및 정밀점검 주기 변경: 4년(안전진단), 2년(정밀점검)

※ 상수도시설물 정밀안전진단(점검)용역 개선방안 추진계획 보고(안전조사과-1751, 2021. 2. 17.)

▸ 기존: B 등급 이상으로서 5,6년에 진단 1회, 2,3년에 점검 1회 시행

▸ 변경: 4년에 안전진단 1회, 2년에 정밀점검 1회 시행 (붙임5)

2		추진 계획

□ 용역명: 2022년 대현산배수지 등 6개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역

□ 용역 기간: 2022. 3.~2022. 12.

□ 대상 시설물

❍ 배수지･아리수올림터: 총 6개소(배수지 4개소, 아리수올림터 2개소)

구분	안전 진단	대상시설물	위치	용량	준공 연도	평가 등급	비고
배 수 지 (4)	정밀 안전 진단 (2개소)	******	성동구 금호동1가 1-72	200,000㎥	2002년	B	-
		*****	성동구 금호동3가 산1	1,000㎥	1992년	B	-
	정밀 안전 점검 (2개소)	*****	중랑구 면목동 산1-4	80,000㎥	2002년	B	-
		******	중랑구 면목동 산1-4	6,000㎥	2002년	B	-

아 리 수 올 림 터 (2)	정밀 안전 진단 (1개소)	****** ******	성동구 금호동1가 1-72	53,000㎥/일	2002년	B	-
	정밀 안전 점검 (1개소)	***** ******	중랑구 면목동 산1-4	12,000㎥/일	2002년	B	-

□ 소요 예산: ********* (기술용역타당성 심사 결과-붙임1, 2)

❍ 예산 과목: 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비(수선유지비)

※ 세부 사업명: 배수지 등 정밀안전진단·점검 및 시설 정비

□ 용역 방법

❍ 수리시설분야 및 건축분야 또는 종합분야의 안전진단 전문용역 업체에 계약 시행

❍ 총액입찰, PQ(사업수행능력 평가) 심사 대상 용역

□ T/F 구성

❍ 목적: 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역의 내실화 및 효율성 제고

연번	구성원		임무 및 역활	비고
	소속	직책
1	*******	******	*****
2		******	*****
3		******	*****
4		******	*****
5		******	*****
6		******	*****
7		******	*****
8		*************	*****
9		***	*****
10	*******	******	*****
11	*********	**********)	*****	*******
12	*******	******	*****	************ ***********************

□ 과업 내용

❍ 시설물 관련 도서 검토 및 계획 수립

- 설계도면, 시방서, 사용재료 내역 등 시공 관련 자료 수집

❍ 기 실시한 진단 결과 주요사항에 대한 보수 이력 확인

❍ 현장 조사

❍ 종합적인 상태평가: 구조적 상태평가, 기능적 상태평가

- 시설물 기초와 주위 지반으로 구조에 미치는 영향분석

- 구조물 외관조사 및 비파괴 현장시험, 초음파 측정, 재료시험 결과분석

- 부재별 상태평가 및 시설물 전체의 상태평가 등급에 대한 소견

❍ 안전성 평가

❍ 보수･보강 공법 및 개략 공사비, 도면 제시

❍ 보고서 작성 및 기타(유지관리 방안 제시)

3		추진 현황 및 향후 계획

❍ 2021. 7.  1.: 기술용역 타당성 심사 완료(기술심사담당관)

❍ 2022. 1. 19.: 사업수행능력 평가 심의 완료(기술심사담당관)

❍ 2022. 1월 말: 사전규격 공개(조달청 나라장터)

❍ 2022. 2월 초: 용역 발주

❍ 2022. 3.~12.: 사업 착수, 준공 1개월 전 건설기술심의위원회 심의

※ 2022년도 상･하반기 배수지 청소 일정과 병행 시행

❍ 2022. 12월 말: 용역 준공

※ 용역 결과 보고 및 FMS 실적 입력

붙임  1. 기술용역 타당성 심사 결과 1부.

2. 설계내역서 1부.

3. 과업내용서 1부.

4. 사업수행능력 세부평가기준 1부.

5. 정밀안전진단 및 정밀안전점검 주기 1부.  끝.