문서번호	기전과-835
결재일자	2022. 1. 27.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
권기춘		01/27 김형집
협조

『구일초등학교 앞』

원인자부담공사 실정보고

및 설계변경에 대한 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 1.

강서도로사업소

(기전과)

『구일초등학교 앞』

원인자부담공사 실정보고

및 설계변경에 대한 검토보고

우리사업소에서 승인한 교통안전시설(신호) 원인자부담공사와 관련    실정보고 및 설계변경 제출되었기에 검토보고 드림.

Ⅰ		관 련 근 거

교통관리과-27168(2021.12.01.)호

TR-원22-0110(2022.01.26.)호

Ⅱ		공 사 개 요

공 사 명 : 교통신호기 설치공사(구일초등학교 앞)

원 인 자 : ㈜KCC건설

공사기간 : 2021.12.16. ~ 2022. 01. 31.

공사장소 : 구로구 구일초등학교 주변

공사개요 : 교통신호기 신설 및 교체

관련업체 및 주요설치 내용

구 분	설 계	감 리	시공업체	승인주요내용
신호기	㈜동림 티엔에스	㈜트래픽스	새한전설(주)	· 제어기 부품 불필요 · 노후 신호등 교체 (규제사항 아님)

Ⅲ		감리사 실정보고 내용

보고내용

- 설계도서와 상이한 부분, 현장 여건에 맞도록 물량 변경

물량변경내용

구 분	변경내용		비 고
	변경전	변경후
제어기 부분품	2	0	제어기 부품 불필요
차량신호등 설치	1	3	이설 설치하려던 신호등 신규 설치(규제사항 아님)
차량신호등 이설	2	0	신호등 노후로 이설 안함 (규제사항 아님)
소형고압블럭포장	24	0	재사용

Ⅳ		검 토 결 과

감리사 실정보고 및 설계변경에 대하여 승인하고자 함

Ⅴ		행 정 사 항

원인자 및 유관기관(업체) 승인통보

붙임 1. 승인요청 및 감리사 검토의견서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 설계도면(변경전후) 1부.  끝.