문서번호	기술심사담당관-1571
결재일자	2022. 1. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기술관리팀장	기술심사담당관
조장희		정현중	01/27 이임섭
협 조

- 영동대로 지하공간 복합개발 1~4공구 건설공사 -

설계경제성(VE) 검토 실행계획

2022. 1.

기술심사담당관

- 영동대로 지하공간 복합개발 1~4공구 건설공사 -

설계경계성(VE) 검토 실행계획

「영동대로 지하공간 복합개발 1~4공구 건설공사」와 관련하여 실시설계에 대한 설계경제성(VE) 검토를 위하여 설계경제성검토소위원회를 구성․운영하고자 함

		추진근거

□ 2021년 설계경제성(VE) 검토 운영계획(행정2부시장 방침 제6호, '21.1.14.)

□ 서울특별시 설계경제성(VE) 검토 운영지침('21.1.14.)

		신청개요

□ 신청부서 : 도기본 영동대로복합개발추진단(`22.1.24.)

□ 사 업  명 : 영동대로 지하공간 복합개발 1~4공구 건설공사

□ 위    치 : 코엑스 사거리(9호선 봉은사역) ~ 휘문고 사거리

************************************************

□ 사업내용 : 복합환승센터 1km, 봉은사역 환승, 삼성역 확장 등

구 분		계	1공구	2공구	3공구	4공구
규 모		<연장 1,000m> ․환승센터 597.15m ․본선 402.85m	<연장 218m> ․환승센터 137.65m ․본선 80.35m	<연장 200m> ․환승센터 200m	<연장 200m> ․환승센터 200m	<연장 382m> ․환승센터 59.50m ․본선 322.50m
*** ****	**	******	*****	*****	*****	*****
	**	***	***	***	***	***
실시설계 적격자(용역사)		-	DL ENC(동해)	현대건설(동명)	현대건설(도화)	롯데건설(삼보)

□ 위치도 및 조감도

		운영협의회 개최결과

□ 회의개요

○ 일    시 : `22. 1. 26.(수) 10:00

○ 장    소 : 기술심사담당관 회의실

○ 검토위원 : 기술심사담당관(위원장), 기술관리팀장(간사)
심사총괄팀장, 기술지원팀장(위원)

□ 회의결과

○「건설기술진흥법 시행령」에 따른 설계경제성(VE) 검토 대상사업(총공사비 100억원 이상)이므로 설계경제성검토소위원회를 구성하여 설계경제성(VE) 검토 시행

○ 기술심사담당관에서 대행하여 설계경제성(VE) 검토 추진

		세부 실행계획

□ 설계경제성검토소위원회 구성

구 분	소 속		성 명	비 고
업무 총괄	위원장	기술심사담당관	이임섭	․설계경제성(VE) 검토 계획 수립 ․회의 지원
	간 사		정현중
	담당자		조장희 황영식 이범섭
리더	㈜플러스에이컨설팅		김주완	․워크숍 준비, 진행 ․결과보고서 작성
진행보조요원	㈜플러스에이컨설팅		서희미	․워크숍 준비, 보조 ․결과보고서 작성 보조
외부 검토위원 (6개 분야)	******	***	***	․기능분석 ․기술검토 ․아이디어 제안 및 평가 ․제안서 작성
	****	**********	***
	****	***	***
	*******	********	***
	*******	*****	***
	****	*****	***
	******	***	***
	******	********	***
발주부서	도기본 영동대로복합개발추진단		이시정	․사업설명, 제안서 검토
설계사	(1공구)	동해종합기술공사	임경완	․사업설명서 준비 ․제안서 원가분석 등
	(2공구)	동명기술공단	신재홍
	(3공구)	도화엔지니어링	이정현
	(4공구)	삼보기술단	박진수

□ 주요 검토내용

○ 건설공사의 설계, 시공, 유지관리 등 경제성 분석

○ 공사 시행의 적정성 및 사용자 편의성

○ 시설물 안전 및 고효율 공법 적용의 가능성 등

□ 회의일정

일 시	추진내용	비 고
2.3.(목)~2.14.(월)	- 설계도서 사전검토	-
2.14.(월) 10:00~17:00 (워크숍 1일차)	- 사업설명 및 질의응답, 현장답사, 성능평가, 기능분석 ※ 회의 : 비대면 답사 : 대면	VE워크숍 (서소문2청사)
2.22.(화) 10:00~17:00 (워크숍 2일차)	- 성능평가, 아이디어 창출 및 개략평가 ※ 회의 : 대면
2.24.(목) 14:00~17:00 (워크숍 3일차)	- 성능평가, 아이디어 창출 및 개략평가 ※ 회의 : 비대면
3.3.(목) 10:00~17:00 (워크숍 4일차)	- 구체화 검토 및 발표, 아이디어 평가 ※ 회의 : 비대면
3.4.(금)	- VE 제안서 통보(채택여부 요청)	기심→발주부서
3.14.(월)	- VE 제안 채택결과 회신	발주부서→기심
3.31.(목)	- 설계경제성(VE) 검토 결과 통보	기심→발주부서

		행정사항

********************************************

*********************************************

*********************************************

*************************************************

□ 향후계획

○ `22. 3.  : 설계경제성(VE) 검토 결과 통보

붙임  1. 설계경제성(VE) 검토 신청서 1부.

2. 설계도서 1부.(별도첨부).  끝.