문서번호	기전설비과-380
결재일자	2022. 1. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	시설부장
이재돈		代이재돈	01/27 박상보
협 조

2022년 한강공원 조명시설

운영 및 설치 추진계획

2021. 1.27

한강사업본부

(기전설비과)

2022년 한강공원 조명시설 운영 및 설치 추진계획

한강공원의 밝고 쾌적한 야간환경 조성을 위한 조명시설 운영 및   설치 등 철저한 유지관리로 이용 시민의 안전과 편의를 제공하고자 함.

□ 시설 현황

○ 조명등 현황

총등수	공원등	자전거도로등	나들목등	기타등
13,151	4,491	2,236	3,084	3,340

※ 기타조명은 볼라드, 바닥, 수목 등 소형의 조명등임

□ 추진계획

○ ************************************

연번	예산구분	사 업 개 요	사업비 (백만원)	사업기간
*			*****
*	*****	***************** *****************	***	***********
*	***	************************ **************	***	***********
*	***	*********************** **********************	***	***********
		********************* *************************	***	***********
		*********************** *****************	***	***********
*	*****	***************	*	***********

□ 조명시설 운영 및 유지관리 계획

○ 조명시설 운영
- 점․소등 방법 : 원격제어 시스템에 의한 자동제어(컴퓨터 내장 무선통신수신기)

- 운영시간 : 일몰 후 16분 ~ 일출 전 16분 (일부조명 계절별 시간대별 탄력적 운영)

- 공공요금 납부

· 고지서에 의한 전기요금 및 통신요금 매월 말일 일괄 지출

○ 조명시설 유지관리

- 점검 및 정비

· 전문기관 점검 : 3년 1회 한국전기안전공사 법정 정기점검 실시

· 자체 점검 : 1일 1회 이상 수시 순찰 및 점검 (공원별 안내센타)

· 안전사고 대비 특별점검

▷ 해빙기 대비 :  3월

▷ 우기철 대비 :  6월

▷ 동절기 대비 : 11월

· 점검반 구성 : 기전설비과 6개조 13명

· 점검내용

▷ 조명시설의 누전여부, 등기구 불량, 부점등 등 시설상태 점검

▷ 등주 상태, 케이블노출, 표찰 등 기타 부적합 사항 점검

- 유지관리(보수)

· 기동보수반 : 고장시설 보수 및 누전선로 점검·정비(경미한 사항 정비)

· 연간단가 : 선로교체, 글러브세척, 등기구교체, 개량 및 신설 등 긴급보수

- 보수자재 확보

· 조달구매 : 등주, LED조명 등(3자단가 품목)

· 일반지출 : 300만원 미만 (장갑, 테이프, 컨버터 등의 소모품)

○ 민원사항 처리

- 공원등 부점등 기타 경미한 사항 : 당일보수 또는 익일 보수

- 공원등 개량 및 기타사항 : 10일 이내 처리(자재구매 설치시 제외)

○ 홍수시 조명 분전반 관리

- 팔당댐 방류량(3,000~15,000㎥/sec) 예고에 따른 1~3단계 상황발령

· 상황 발령시 단계별 한강공원 조명시설 분전반 전원 차단

□ 사업별 추진계획

○ 조명시설 유지보수공사(연간단가)

- 사업기간 : ’22. 1. ~ 12.

- 사 업 비 : ************************

- 사업내용 : 노후선로 점검 및 보수, 노후 등주 및 분전함 · 등기구 교체,
부점등 보수 및 조도 개선 등

- 추진경위

· ’21. 11. 30 : 공사방침

· ’21. 12. 30 : 공사발주

· ’22. 01. 07 : 공사계약  및 착공

- 추진일정

· ’22. 12.31  : 공사 준공

○ 조명시설 LED등 교체공사

- 사업기간 : ’22. 1. ~ 10. 31.

- 사 업 비 : ******

- 사업내용 : 기존 메탈 등기구 → 고효율 LED 등기구로 교체 (760등)

- 추진일정

· ’22. 1. ~  2. : 설계도서 작성 및 공사발주

· ’22. 3.        : 공사계약 및 착공

· ’22.10.       : 공사준공

< 조명등 LED 교체 현황 >

〈’21. 12월 기준〉

***	*	********	******	****	****
****	******	*****	*****	*****	*****
*********	****** *******	***** *******	***** *******	***** ******	***** ******
********	***	***	**	*	*
****	***	*	*	*	***

※ 교체제외 : 진입로 계단, 경사로 등에 설치된 10W 이하 소형시설

○ 산책로 조명 설치공사

- 사업기간 : ’22. 1. ~ 10. 31.

- 사 업 비 : ******

- 사업내용 : LED 100W 200등 설치

· 어두운 지역 산책로 등에 설치(14개소) : 150등

· 조명이 없는 수변 공간(호안가)에 신설(3개소) : 50등

- 추진일정

· ’22.  1. ~  2. : 설계도서 작성 및 공사발주

· ’22.  3.         : 공사계약 및 착공

· ’22. 10.          : 공사준공

□ 행정사항

○ 한강공원의 조명시설 운영 및 유지관리 철저

○ 2022년 추진 사업 적기 시행

○ 안내센터에 야간 순찰시 조명등 부점등 점검사항 발견시 제출토록 공문 발송

붙 임 1. 조명시설 현황 1부.

2. 점검반 편성 1부.  끝.

3. 상황단계별 분전반 전원 차단현황 1부.  끝.