문서번호	한양도성도감-910
결재일자	2022. 1. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	도성관리팀장	한양도성도감과장
박민상	이원재	01/27 김홍진

2022년 한양도성 순성길 정비 계획

2022. 1.

문 화 본 부

(한양도성도감)

2022년 한양도성 순성길 정비 계획

한양도성 성벽(유산)의 보호와 탐방객의 안전 사고 예방을 위한 순성길(탐방로)   시설물 보완 및 노후·훼손된 시설물의 지속적인 정비를 시행하고자 함.

Ⅰ		추진 근거

□「서울 한양도성 순성길 정비 지침 (행정1부시장 방침)」(‘13.6.24.)

□ ‘22년도 문화재 보수정비사업 추진 지침 (문화재청 기획재정담당관) (‘22.1.07.)

Ⅱ		그간의 추진현황 및 실적

□ ‘13. 2. ~ 6. : “한양도성 순성길(탐방로) 정비 지침” 등 마련

○ 한양도성 자문회의 등 전문가 자문의견을 수렴하여 진정성 있는 도성보존을

전제로 순성길(탐방로)의 효과적인 관리 및 정비 지침 마련

	《 한양도성 탐방로 관리 지침 주요 내용》
① 도성과 자연 환경을 훼손하는 인위적인 요소를 최소화 한다. ② 지속 가능한 도성의 보존관리를 위해 친환경적인 재료를 사용한다. ③ 탐방로 신규 조성시에는 성벽으로부터 일정 거리를 이격하고, 경사지 등에 시설 설치가 불가피할 경우, 원상태 복원이 가능하도록 시공한다.

□ ‘14. ~ ‘16. : 한양도성 자문회의, 한양도성 보존관리․활용 토론회,

성벽 주변의 각종 체육시설 등의 이전 협의 및 정비

□ ‘14. 7. ~ ‘21. 12. : 한양도성 탐방로 정비 공사 지속적 시행

○ 한양도성 백악구간 외 3개 구간(인왕, 남산, 낙산) : 총14,870m 정비

□ 전년도(‘21년) 순성길 정비 주요 사례

인왕산 성벽 붕괴구간 주변 우회 순성길 정비(목재데크 설치)		인왕산 기차바위 하부 내측 순성길 정비

백악산 숙정문 하부 외측 순성길 정비(노후 목재데크 교체)		남산 야외 유적전시관 주변 노후 순성길 정비

Ⅲ		2022년 사업 계획

□ 위    치 : 백악구간 외 3개 구간 (인왕, 남산, 낙산)

□ 사업기간 : ‘22년 1월 ~ 12월

□ 주요 정비계획

○ 백악 : 백악마루, 곡장, 청운대, 숙정문 주변 노후 계단, 데크, 휀스 등 정비

○ 인왕 : 친환경 야자매트, 배수로, 로프 휀스 및 각종 민원사항 등 정비

○ 낙산 : 낙산공원 외측 순성길 노후된 바닥 포장 및 주변 시설 정비

○ 남산 : 남산공원 내․외부 노후 순성길 및 주변 정비 등

□ 추진방법

○ 추진방향

-「한양도성 순성길 관리 지침」및 ‘22년 문화재보수정비 국고보조사업 추진 지침을

실시설계 단계에서 반영하여 공사발주하고 연내 완공 목표

- 한양도성의 보호와 도성 경관을 고려하여 친환경적 재료 활용하여 지속 정비

○ 추진방법  : 한양도성 순성길(탐방로)을 관리중인 해당 자치구(종로구, 성북구) 및 사업소

(중부공원녹지사업소)의 정비대상 조사 결과 및 예산 요청에 대하여

검토하고, 현장여건 및 시급성 등을 감안하여 부서별 예산 재배정

방침수립 및 예산 재배정 (수요조사)	▷	실시설계 (한양도성 순성길 관리 지침 반영)	▷	유관부서 협 의	▷	공사시행	▷	준공보고 (문화재청)
한양도성도감		자치구 / 사업소		한양도성도감 / 자치구 / 사업소 / 군부대 등		자치구 / 사업소		자치구 / 사업소→ 한양도성도감

Ⅳ		소 요 예 산

□ ‘22년 예산액 : ************************

시 행 부 서	요 청 액	재 배 정 액	비 고
합 계	********	******
종로구	*******	*******	백악구간, 인왕구간
성북구	*******	*******	백악구간
중부공원녹지사업소	*******	*******	남산, 낙산
중 구	-	-	남산(다산 성곽길)

○ 한양도성도감(****************************************

***********

○ 예산과목 : 문화본부 한양도성도감, 한양도성 보존․관리 활용, 한양도성 보존․정비

한양도성 탐방로 조성 및 정비, 시설비, 감리비. 시설부대비

Ⅴ		추 진 일 정

□ ‘22. 1. ~ 2. : 수요조사 및 시행계획 수립, 예산 재배정

□ ‘22. 3. ~ 5. : 실시설계 및 청와대 경호처, 수방사 등 유관기관 협의

□ ‘22. 6. ~ 12. : 공사 시행 및 사업 완료

붙 임   1. 현황사진(주요 정비대상) 1부.

2. ‘22년 한양도성 순성길 정비 예산 배정요청 공문 각1부.

3. 한양도성 순성길(탐방로) 관리 지침 1부.

4. ‘22년 문화재보수정비(총액계상) 세부사업 지침(문화재청) 1부. 끝.