투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(실정보고 일부 승인통보(사설항로표지 위탁관리용역))

1.업무지시현장 : 월드컵대교 건설 전기공사(장기-1차) (주)윤익계전, 월드컵대교 건설

전기공사(장기-1차) 주식회사 포스코건설

2.작 성 일 자 : 2022-01-27 12:01:50

3.지 시 내 용

가. 월드컵(감리) 2022-087호(2022.1.24.)호와 관련입니다.

나.「월드컵대교 건설 전기공사」 관련 건설사업단의 실정보고(사설항로표지 위탁관리용역 연장)에

대한 검토결과 사설항로표지 위탁관리를 한강사업본부로 이관 진행중임에 따라,

감리 의견 중 일부만 승인통보하오니, 향후 해당 승인건에 대한 후속조치(설계변경 등)를

이행하여 주시기 바랍니다.

< 위탁관리 용역 연장 일부 승인 내용>

1) 감리단 검토의견 : 2022. 1. ~ 2022. 12 (12개월)

2) 발주처 일부승인 : 2022. 1. ~ 2. (2개월)

※ 2월중 이관 예정으로 진행상황에 따라 변동가능성 있으며, 변동시 추가로 실정보고

하여주시기 바랍니다.  끝.

※ 본 기안은 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시

One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

※ 업무지시전 내용 수정을 원하는 경우 One-PMIS로 반송 후 One-PMIS에서 재작성을 해

주시기 바랍니다.

주무관							최환수			건축설비과장					01/27 배수웅
협조자
시행			설비부-1207									(						)		접수											(						)
우	06300					서울시 중구 청계천로 8 프리미어 플레이스빌딩 15F															/			http://seoul.go.kr/
전화		02-3708-8626						/전송			02-3708-8659					/	chs0914@seoul.go.kr												/	부분공개(5)