문서번호	소방행정과-1059
결재일자	2022. 1. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
담당자	장비회계팀장	소방행정과장		소방서장
박종삼	이용선	마성제		01/28 박찬호
협 조

2022년 잠원119안전센터 청사 외벽 드라이비트 교체 공사 계획

2022. 2.

서초소방서 소방행정과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더 자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산·제시·분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념·성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

2022년 잠원119안전센터 청사 외벽 드라이비트 교체공사

서초소방서 잠원119안전센터 청사 외벽의 드라이비트(가연성)를 해소하여 화재 위험성을 사전에 차단하고자 함.

Ⅰ		관련근거

□ 2020년도 서울특별시의회 행정사무감사 지적사항(2020.11.5.)

□ 市소방행정과-1832(2022.1.21.)호「2022회계연도 소방특별회계 예산편성 결과 및 집행지침 알림」

Ⅱ		추진배경

□ 가연성 재질(드라이비트)로 시공된 외벽에 화재발생시 급격한 연소 확대 우려

□ 불연(준불연)재료 시공을 통해 소방청사에 대한 화재위험성 해소

Ⅲ		추진개요

□ 사 업 명 : 2022년 잠원119안전센터 청사 외벽 드라이비트 교체 공사

□ 사 업 비 : 금214,620천원(금이억일천사백육십이만원)

❍ 소방관서 시설물 유지보수 / 시설비 : 금210,000천원(금이억일천만원)

❍ 소방관서 시설물 유지보수 / 감리비 : 금4,620,000원(금사백육십이만원)

□ 대    상 : 서초소방서 잠원119안전센터

❍ 서울특별시 서초구 서초중앙로29길 6(반포동 45-3)

□ 규    모

❍ 구    조 : 철근콘크리트조 지상 3층 / 지하 1층

❍ 연 면 적 : 751.8㎡(건축면적 308.7㎡)

❍ 준공년도 : 2001. 12. 15.

□ 공사내용

❍ 청사 외벽(드라이비트) 철거 후 금속마감제 설치

❍ 공사면적 : 약437㎡(2면)

Ⅳ		추진계획

□ 건    명 : 2022년 잠원119안전센터 청사 외벽 드라이비트 교체 공사

□ 추진기간 : 2022년 2월 ~ 5월(약4개월)

일정 공정	2월			3월					4월				비고
	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	5주	1주	2주	3주	4주
설계													건축설계
착공준비													공사신고, 감리계약 등
드라이비트 철거													계약체결
폐기물처리													폐기물 처리
관급자제설치													금속제 외부마감
건축공사													단열제
준공검사													준공확인 및 검사수
대금지급													최종 대금지급

□ 추진일정

❍ 설계용역 발주 : 2022.2.7. ~ 2.9.

❍ 드라이비트 해체․제거 공사 발주 : 2022.2.9. ~ 2.11.

❍ 관급자재 및 폐기물처리용역 발주 : 2022.2.14. ~ 2.18.

❍ 감리용역 및 건축공사 발주 : 2022.2.21. ~ 2.25.

❍ 공사기간(예정) : 2022.3.2. ~ 4. 15.

❍ 검수 및 대금지급 : 2022.4.18. ~ 4.29.

Ⅴ		추진방향

❍ 예산절감을 위해 건축설계를 통해 공정별 예산 산출

❍ 고품질 외벽자재(우수조달제품 중 불연, 결로방지 및 내구성이 뛰어난 제품) 선정

❍ 외장 마감재의 재질 및 색상은 예산의 범위내에서 직원의견 반영

❍ 공사중 현장출동대원 불편 최소화 및 인근 건물에 사전협조 요청으로 민원 발생 방지

❍ 공사 관계자(설계,감리,시공) 발열체크 등 코로나19 방역관리 철저

Ⅵ		기대효과

❍ 위험성 없는 불연(준불연) 재료 시공을 통해 위험요소 제거

❍ 청사 외벽재 시공을 통한 건물 미관 개선.  끝.