문서번호	교통정책과-2897
결재일자	2021. 2. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
★주무관	철도계획팀장	교통정책과장
최연섭	정대득	02/16 유재명

지하철 4호선 운영필수시설 설치공사

위·수탁협약 법률자문결과 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 2.

교통정책과

지하철4호선 운영필수시설 설치공사

위·수탁협약 법률자문결과 검토 보고

4호선 운영필수시설 이전 설치를 위해 서울시와 국가철도공단간 체결예정인 위·수탁협약서의 법률자문결과를 반영한 위·수탁협약 조치계획을 보고드림

□ 위·수탁협약 개요

*************************************************

************************************

**********************************

********************************************

***************************************등

□ 그간 추진경위

○ ’19. 2~10. : 4호선 운영필수시설 설치 협의(국토부, 서울시, 남양주시 등)

- 공사는 진접선 본선과 인접시공으로 국가철도공단에 위탁

○ ’20. 2,~9. : 관계기관 협의(국토부, 서울시, 남양주시, 국가철도공단 등)

○ ’20. 9. 29  : 관계기관 합의서 체결(국토부, 서울시, 남양주시, 국가철도공단, 한국철도공사, 서울교통공사)

- 진접선 개통 및 4호선 운영필수시설 이전에 관계기관이 협력하여 추진

*********************************************

***********************************

**************************************

**********************************************

*****************************

***************************************************

**********************

**************************************

*********************

********************************************************

*********************

****************************************

****************************************************************************************

*************************************************

*******************************************************************

□ 검토의견

******************************************************************************************************

- 진접선 개통(‘21.12.)에 지장을 주지 않기 위해서는 위·수탁협약 체결이 시급하며 협약 지연 시 진접선 개통 지연우려가 있음.

*********************************************

*********************************************************************

□ 향후계획

○ ’21. 2. : 제299회 시의회 임시회 위·수탁 협약 동의 추진

○ ’21. 2. : 위·수탁 협약 체결

********************

************************

****************************