문서번호	설비부-1300
결재일자	2022. 1. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	환경설비과장	설비부장
강민우	김현기	01/28 김호성

『광역소공인특화지원센터 건립 전기공사』

물가변동(1회,2회)으로 인한 계약금액 조정 검토보고

2022. 1월

도시기반시설본부

(설 비 부)

「광역소공인특화지원센터 건립 전기공사」

물가변동(1회, 2회)으로 인한 계약금액 조정 검토보고

우리부에서 추진중인「광역소공인특화지원센터 건립 전기공사」관련, 계약상대자로부터 물가변동으로 인한 계약금액 조정 요청이 있어 다음과 같이 검토보고 드림

1		공사개요

□ 공 사 명 : 광역소공인특화지원센터 건립 전기공사

□ 위    치 : 서울특별시 성동구 아찬산로 17길 9

□ 규    모 : 지하2층/지상7층, 연면적 2,711.51㎡

□ 계약금액 : **********************************

□ 공사기간 : **************************************************

□ 도 급 사 : *************

□ 감 리 사 : ************************

2		관련근거

□ 물가변동 검토보고 : 광역 CM-260호(2022.01.14.)

□ 지방계약법 시행령 제73조(물가변동으로 인한 계약금액 조정)

3		검토내용

□ 내용 물가변동 조정 현황

구 분	조정률	경과기간
1회	*****	****	***************** *****************
2회	*****	****	***************** *****************
기준	증감 3%이상 시	계약일(직전 조일일)로부터 90일 경과

□ 계약금액 조정 세부검토 내용

구 분		1회	2회	비 고
물가변동 대상금액(A)		************	************
물가변동 제외금액(B)		************	************
물가변동 조정기준일 현재 공정률	예정공정률	**	******	예정공정표 기준
	실행공정률	**	******	One-PIMS 기준
	기성공정률	******	******	ESC 신청일 기준
물가변동 적용대가(C)		************	************	C=A-B
물가변동 조정률(D)		*****	*****
물가변동 등락대상 조정금액(E)		***********	***********	E=C×D
선급금 공제금액(F)		**	**	선금지급 없음
물가변동 적용금액		***********	***********	천단위 절사

□ 물가변동으로 인한 계약금액 조정 내용

(단위 : 원)

구 분	당 초	변경후	증·감액
총차	***********	***********	************
2차	***********	***********	************

□ 건설사업관리기술자 의견

- 도급사가 제출한 물가변동으로 인한 계약금액 조정 보고서 검토결과, 경과기간이 기준시점으로부터 90일 이상이 지났고, 지수조정률이 3%이상으로 관련 규정에 의거 물가변동 조정 요청이 적정하게 산출된 것으로 판단됨

4		조치계획

□ 물가변동으로 인한 계약금액 조정에 대한 건설사업관리단의 검토 보고가 적합하다고 판단되므로 계약금액 조정을 승인하고자 하며, 추후 변경계약 시 반영될 수 있도록 업무지시하고자 함.

붙임  1. 건설사업관리단 검토의견서 1부.

2. ESC(1,2회) 보고서 각 1부.  끝.