문서번호	진료부-718
결재일자	2022. 2. 3.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

						시 민
주무관		진단검사의학팀장		진료부장
전영민		代전영민		02/03 심재천
협 조
	서무팀장				허근행
	주무관				박종필

서북병원 생화학 자동분석기 구매 계약 변경계획

2022. 2

서북병원 진료부

(진단검사의학과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더 자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산·제시·분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념·성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

서북병원 생화학 자동분석기 구매 계약 변경계획

서북병원 진단검사의학과 스프링클러 공사로 인해 신규 도입되는 장비에 영향을 끼칠 우려가 있어 공사 완료 후 설치 예정에 따라 계약기간을 연장변경 계약하고자 함

Ⅰ		구매계약 현황

▢ 계 약 건 명 : 서북병원 생화학 자동분석기 구매

▢ 계 약 업 체 : 바이오젠(대표: 심계선)

▢ 계 약 기 간 : 2021.12.10 ~ 2022.02.07

▢ 계 약 금 액 : ***********************

▢ 계약연월일 : 2021.12.10.

Ⅱ		계약 변경 개요

▢ 계약 변경 사유

❍ 서북병원 진단검사의학과 내 스프링클러 작업 일정과 신규 장비 설치 일정이

겹쳐 계약기간 연장

❍ 고가 장비 설치 후 스프링 클러 작업 할 경우 공사 먼지, 협소한 장소

등에 따른 장비 이동 등 검사 결과에 영향을 줄 우려가 있음

▢ 계약 변경 내용

구 분	변경 전	변경 후 (최종)	비 고
계약업체	****	변경사항없음
계약금액	************	변경사항없음
계약기간	2021.12.10. ∼ 2022.02.07.	2021.12.10. ∼ 2022.05.07.	연장(3월)

▢ 예산항목 : 서북병원 원무과, 연구활성화 및 시설환경개선으로     진료서비스 증진, 서북병원 운영, 서북병원 의료 및 행정장비     확충, 자산및물품취득비

Ⅲ		행정 사항

원무과 협조사항

✜ 서북병원 생화학 자동분석기 구매 변경계약 의뢰

(원무과 서무팀)

끝.