투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	설계변경(총괄19회, 제13차3회) 시행 및 변경계약 의뢰[서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업 전면책임감리용역]

우리 본부에서 시행 중인 『서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업 전면책임감리용역』과 관련 다음과 같이 설계변경(총괄19회, 제13차3회)시행하고 변경계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 설계변경 현황

가. 용 역 명 : 서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업 전면책임감리용역

나. 용 역 비 : ***************************************

다. 계약기간 : 총괄 ’09.11.30.~’22.02.04. / 13차 ’20.11.11.~’22.02.04.

라. 계 약 자 : ㈜도화엔지니어링 외 1개사

마. 설계변경 현황

1) 총괄19회 변경 현황

구 분	당 초	변 경	증 ㆍ 감	비 고
계약기간	‘09.11.30~’22.02.04	‘09.11.30~’22.03.11	증) 35일
계약금액	***************	***************	**************

2) 13차3회 변경 현황

구 분	당 초	변 경	증 ㆍ 감	비 고
계약기간	‘20.11.11~’22.02.04	‘20.11.11~’22.03.11	증) 35일
계약금액	**************	**************	**************

바. 설계변경 사유

************************************************ *******

사. 예산과목: 물재생시설과, 자본적지출, 비가동설비자산취득, 건설중인 자산, 시설비 및 부대비, 감리비[공기업하수도사업특별회계]

붙 임   1. *******************

2. **************

3. **************

4. ****************************

5. ************

	방재시설부장
주무관	이성우		환경시설과장	오열상		방재시설부장	02/03 이동훈
협조자
시행	방재시설부-1224	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동)	/
전화	02-3708-8783	/전송	02-3708-8756	/	kery123@seoul.go.kr	/	부분공개(5)