문서번호	건축부-1747
결재일자	2022. 2. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		환경시설과장	건축부장
이제관		백윤기	02/03 신명승
협조

『AI건립공사 건설폐기물처리용역』

준공기한 연기 검토보고

2022. 2

도시기반시설본부

(건 축 부)

『AI건립공사 건설폐기물처리용역』

준공기한 연기 검토보고

「AI지원센터건립공사 건설폐기물처리용역」관련 건설사업관리단의

준공기한 연기 승인요청에 대하여 검토 보고 드림

1		용역개요

○ 용 역 명 : AI지원센터건립공사 건설폐기물 처리용역

○ 용역내용 : 건설폐기물 수집·운반 및 처리(2,730.15톤)

- 폐콘크리트 1,321.28톤, 폐아스콘 1,139.63톤, 건설폐재류 93.19톤, 혼합폐기물(폐보드,

폐합성수지) 16.97톤, 혼합폐기물(폐유리,폐타일)32.06톤, 혼합폐기물 10톤 등

**************************************************

******************************************

****************************

2		계약변경 내용

○ 관련 근거

- 건설폐기물용역 계약기간 연장 승인 요청[근정 제2022-28, 2022.02.03.]

○ 계약변경 내용

(단위:원)

구분		변경전	변경후	증․감
**	****	********************	********************	*****
	*****	************	************
**	****	********************	********************	********
	*****	***********	***********	****

○ 준공기한 연기 사유

- 토목공사(터파기) 진행중으로 폐기물 반출 시기 미도래로  용역기간 연장 필요

○ 준공기한 연기 귀책 사유 : 서울특별시 도시기반시설본부

- 지체상금 부과 여부 → 미 부과

3		건설사업관리단 검토의견

○ 건축공사 실시 공정표 보완(변경)에 따라 현재 토목공사 진행중으로 폐기물반출 시기 미도래로 용역기간 연장이 필요

4		처리의견

○ 건설사업관리단으로부터 제출된 의견에 따라 건설폐기물 처리용역에 대한 용역기간 연장(변경계약)을 시행하고저 함.

붙 임 :  건설폐기물 변경계약 요청(합의각서 포함) 1부. 끝.