문서번호	청소행정과-3486
결재일자	2022.2.4.
공개여부	부분공개
방침번호

★주무관		청소작업팀장		청소행정과장		복지국장
김경현		代김태윤		정헌욱		02/04 이윤영
협조
	재무과장		송경택
	계약팀장		홍혜영

★ ◉

						대형생활폐기물 수집·운반 위탁용역 계약
[cc	c	cc		cc			c
사후정산 및 설계 변경 검토보고

2022. 2

(청소행정과)

- 대형생활폐기물 수집·운반 용역 기간 만료에 따른 -

사후정산 및 설계변경 검토보고

대형생활폐기물 수집·운반 위탁계약이 2021 12. 31일자로 기간이 만료됨에 따라

사후 보험료 정산 등 설계변경 사항이 발생되어 아래와 같이 보고 드림

□ 추진 근거

○ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제8절 보험료 사후정산 등

(시행 2016. 1.20 , 행정자치부 예규 제197호, 2022.1.7 개정)

○ 지방계약법 제22조(물가변동 등에 따른 계약 금액의 조정)

○ 계약체결 (청소행정과-63, 2021.1.5)

□ 계약 개요

○ 건    명: 대형생활폐기물 수집․운반 대행 용역

○ 계약기간: 2020. 11. 1. ~ 2021. 12. 31.(14개월)

※ 사고이월비 정산을 위해 계약기간 변경 2022.3.31까지(청소행정과-35899)

○ 사업내용

- 대형생활폐기물 수집운반 처리 대행 위탁 운영

○ 대행업체

-  ㈜고려도시개발, ㈜성동환경, ㈜나라환경산업, 신흥환경(주)

******************정산 내용

○ 국민연금, 건강·요양보험, 고용·산재보험 등 정산(청소행정과-2112호)

○ 업체별 보험료 및 직접 노무비 정산서류 제출

******************설계변경 내역

○ 업체별 세부내역

(단위:원)

구분		㈜고려도시개발	㈜성동환경	㈜나라환경산업	신흥환경(주)
계약금액(총차)		488,667,760	487,517,550	487,808,950	486,745,500
계약금액(2차)		437,011,760	435,917,550	436,390,210	435,085,500
보험료	국민연금	2,069,146	3,120,808	2,763,325	99,119
	건강요양	1,658,477	459,420	2,300,730	-140,968
소계		3,727,623	3,580,228	5,064,055	-41,849
일반관리비(10%)		372,762	358,023	506,405	4,184
이윤(10%)		410,039	393,825	557,046	4,603
총계		감4,510,420	감4,332,070	감6,127,500	50,630
직접노무비		-	-	-	-
변경금액(총차)		484,157,340	483,185,480	481,681,450	정산대상 아님
변경금액(2차)		432,501,340	431,585,480	430,262,710	변경없음

○ 업체별 집행 현황

(단위:원)

구 분	㈜고려도시개발	㈜성동환경	㈜나라환경산업	신흥환경(주)
당초 배정액 (2차 12회)	58,042,830	57,369,870	59,151,760	56,077,500
정산액	-4,510,420	-4,332,070	-6,127,500	-
집행액	53,532,410	53,037,800	53,024,260	56,077,500
잔 액	4,510,420	4,332,070	6,127,500	-

******************보고자 의견

○ 상기와 같이 발생한 변경사항에 대해 설계변경 처리코자 함.

붙 임 1. 협조공문 1부.

2. 업체별 제출 서류 각 1부.  끝.