문서번호	시설관리과-2099
결재일자	2022. 2. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
시설관리팀장	시설관리과장	강서수도사업소장
정수용	유명은	02/07 代추경민
협 조
	급수운영과장		성기선
	급수관리팀장		정헌석
	주무관		강병국
	주무관		노병권

중대재해 및 해빙기 안전사고 예방을 위한

상수도관로 특별 점검계획

2022. 2.

강서수도사업소

중대재해 및 해빙기 안전사고 예방을 위한

상수도관로 특별 점검계획

｢중대재해 처벌 등에 관한 법률｣ 시행(’21.1.26.공포, ’22.1.27.시행)에 따라 상수도관로에 대한 특별 점검을 실시하여 중대재해(중대시민재해)를 사전에 예방하고자 함

1				추진근거		‘

□ 관련규정

○ 중대재해 처벌등에 관한 법률 제2조 4 “공중이용 시설” 나

○ 중대재해 처벌등에 관한 법률 시행령 제2조 1~2호

-「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」제2조 제1호 시설물

○ 중대재해 및 해빙기 안전사고 예방을 위한 상수도관로 특별 점검계획,

[누수대응과-1012(2022.01.28.)]

□ 대상 시설 현황

구분	업무시설 (3천㎡이상)	상수도 시설물
		계	송수관로	500㎜이상 배수관
규모	1개소	171㎞	34㎞	137㎞

2				점검계획		‘

□ 점검대상

○ 중대재해처벌법 대상 시설 : 송수관 34㎞

○ 시민재해 예상 시설 : 주간선도로 및 보조간선도로 500㎜이상 배수관

취수장 (0개소)			정수장 (0개소)			지역배수지(4개소)		1차배수지 (4개소)			아리수올림터 (5개소)		증압장 (10개소)			수요가 급수
	도수관 84㎞				송수관 34㎞							배‧급수관 1,174㎞
					법정관리시설(1종시설물)									법정외 시설물

※ 사업소별 누수취약지역, 누수가 많이 발생하는 관로 추가시행 가능

- 사업소별 상수도관로 점검대상

(단위 : ㎞)

구 분	계	강서	양천	구로	비고
합 계	171	69	56	46
송수관	34	6	10	18
배수관 (500㎜이상)	137	63	46	28

□ 점검기간 : 2022. 2. 7. ~ 3. 31.까지(긴급 점검 시행)

○ 작업준비 및 도면숙지 : ‘22. 2. 7 ~ 2. 8.

○ 현장점검 : ’22. 2. 9 ~ 3. 31.

□ 점검방법

○ 점검반 편성

- 점검주체 : 상수도공사 건설사업관리용역에 추가 과업지시(본부)

용역명	계약자	용역기간	계약금액 (백만원)
강서 상수도공사 건설사업관리용역	㈜대한콘설턴트 외 1개사	‘21. 6.22 ~ 23. 6.21	5,679

- 점검인원 : 1개반(2인) 운영

- 차량지원 : 렌트 및 자체 차량 이용시 비용 지급(본부)

- 안전모, 안전화 등 안전장비 착용 철저

○ 점검방법(육안점검)

- 도로별 체크리스트에 의한 점검

- 차량 및 도보 순찰을 통한 육안 점검

※ 사업소 순찰반과 합동점검 시행(해당 순찰구간 최초 점검시)

□ 점검내용

○ 도·송수관로 누수, 침하(Depresson), 도로함몰(Cave-in), 공동(Cavity)등 유해, 위험요인 확인·점검

- 시설물 내구성 및 구조적 안전성에 초점을 맞춘 점검이 아닌 이용자의 이용 측면에서 위험성 발견에 초점을 둔 점검 시행

○ 유해 · 위험요인 발견 시 즉시 조치

- 피해 방지를 위해 유해 · 위험요인 발견 시 위험표시 설치, 접근 제한 조치, 긴급 상황보고 등 실시(관련부서 통보)

○ 경미한 사항은 순찰 점검결과 지적사항은 점검기간 내 정비 완료

- 장기간 보강이 필요한 사항은 유해·위험요인 표시 및 접근 제한 조치 후 정밀안전진단 용역사 등에 보강방안 검토 후 보강조치

○ 상수도관로 및 밸브 손상에 의한 도로 침하, 함몰, 공동 등 집중점검

- 현수관로 등 노출관로 처짐, 침하, 여부 점검

- 매설관로 지반침하, 함몰, 동공, 물고임 여부 점검

- 밸브실 뚜껑손상, 침하, 함몰, 물고임 여부 등 점검

3				추진일정		‘

○ ’22. 2. 7. : 지하시설물 위치도 및 지하시설물 현황 제공(수도사업소→용역업체)

○ ’22. 2. 8. : 도면 출력, 노선결정 등 작업준비

○ ’22. 2. 9~3. 31. : 현장 점검시행

○ ’22. 4.11. : 점검결과 보고(수도사업소 → 누수대응과, 시설관리과)

4				행정사항		‘

○ 지하시설물 위치도 및 현황자료를 작성하여 제공(※기존 지하안전법에 따른 지반침하 육안조사 관련 자료 활용)

○ 점검구간 상수도관로 점검표 작성 후 익일보고(용역업체 → 수도사업소)

첨부 : 1. 상수도관로 특별 점검계획 1부.

2. 상수도 관로 점검표 1부.

3. 구별 상수도관로 현황 1부.

4. 지하시설물 위치도(별첨) 1부.  끝.