투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전[실정보고 승인(창동 상계 동서간 연결교량 건설공사)]

1.업무지시현장 : 창동 상계 동서간 연결교량 보차도교 건설공사(장기1차) 하웅종합건설(주), 창동 상계 동서간 연결교량 보행교 건설공사(장기1차) 청광건설(주), 창동 상계 동서간 연결교량 보행교 건설공사(장기1차) 주식회사동해종합기술공사, 창동 상계 동서간 연결교량 보행교 건설공사(장기1차) 주식회사 삼보기술단

2.작 성 일 자 : 2022-02-11 09:02:52

3.지 시 내 용

가. 창동상계 제22-006(2022.1.10.)호, 제22-009(2022.1.11.)호, 제22-010(22.1.11.)호 및 제22-012(2022.1.12.)호와 관련됩니다.

나. 우리본부에서 추진중인 「창동 상계 동서간 연결교량 건설공사」와 관련하여 “임시우회도로 및 공사용 진입로 설치 외3” 실정보고 건에 대하여 승인통보 하오니 설계변경 등 사업추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

□ 실정보고 내역

1) 창동 상계 동서간 연결교량 보행교 건설공사(1건)

- 임시우회로 및 공사용 진입로 설치

2) 창동 상계 동서간 연결교량 보차도교 건설공사(3건)

- 가도 설치용 순성토 운반비 반영 및 면적 변경

- 가도 및 임시 우회로 가배수로공 수량변경

- 보행자 보호시설 설치

붙임  실정보고 검토 보고서 각 1부.  끝.

주무관							양용준			터널건설과장					02/11 장종환
협조자				주무관						이회진
시행			토목부-2257									(						)		접수											(						)
우	04520					서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화								/전송			02-3708-2599					/													/	부분공개(5)