(발주처 작성서식)

실정보고 검토서

공 사 명

올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사(조경)

공사개요

· 위    치 : 올림픽대교 남단(송파구 풍납2동)

· 규    모 : 신설 1.6㎞, 이설 1.3㎞

· 공사기간 : ‘16.04.01.~’22.12.31.

· 도 급 비 : 502억원

· 시 공 사 : 대보건설㈜ 외 2개사

· 감 리 단 : ㈜이산 외 2개사

· 설 계 사 : ㈜대한콘설탄트

실정보고 건명

아산병원 후분 조경이관에 따른 관계기관 합동점검 요청사항 설계반영

*************************

실정보고 사유

인수인계관련 관계기관 합동점검 시 요청사항

- 송파구청 요청사항**************************

· 동절기 도로변 수목보호를 위하여 제설재 차단막(공석) 설치

건설사업관리단

검토의견

- 인수기관(송파구청)의 요청사항을 설계에 반영함이 타당함

공기에 미치는 영향

해당없음

변경(안)

- 변경사항 및 공사비 증감사항

구 분			수 량		*******		*** ********
			당 초	변 경	***	***
조경공
방품벽 세우기	H=0.45m	m	-	183	-	662	662
직접비					-	662	662
간접비					-	238	238
도급비					-	900	900

예산조치 계획

당초 도급비 범위내 시행가능 (    )

당초 사업비 범위내 시행가능 ( ○ )

별도(추가) 예산 확보 필요   (    )

추가 행정절차 이행 필요여부

해당사항 없음

발주처

검토의견

- 본 실정보고는 인수기관의 요청사항을 반영한 사항으로, 동절기 동해 및 염해로 부터의 수목보호를 위한 본 실정보고가 타당함에 따라 승인처리하고 추후 설계변경 반영코자 함.

비 고

************************

결재

주무관

김현곤

공원시설과장

이병호

방재시설부장

02/11

이동훈

협조