문서번호	도로과-2171
결재일자	2022.2.11.
공개여부	대시민공개

주무관	도로계획담당	도로과장	건설교통국장
이윤호	어원철	송승익	02/11 이주남
협 조
	도로굴착담당			정재두
	도로시설담당			이태기
	보도관리담당			代김웅
	도로조명담당			박정재

- 2022년 도로 및 도로시설물 등 -

도로과 공사발주 계획 보고

2022.  02.

건 설 교 통 국

(도  로  과)

- 2022년 도로 및 도로시설물 등 -

도로과 공사발주계획 보고

2022년 도로과에서 추진 및 예정인 사업에 대하여 신속한 민원처리와 원활한 도로시설물 관리를 위한 발주사업 계획 보고임.

Ⅰ		추 진 배 경

2022년 일반·특별회계 세입·세출예산 확정알림(기획예산과-14589호)

도로법 제31조(도로공사 와 유지관리 등) 및 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법

2022년 예산 조기집행 관련

Ⅱ		공 사 개 요

총건수 : 25건 (14,965,300천원)

○ 연간단가 사업 13건 9,520,800천원

○ 단일공사 사업 12건 5,444,500천원

연번	사 업 명	예산액(천원)	사업내용	담당팀	비고
합 계		14,965,300
1	구소규모 편익시설 설치공사(연간단가)	1,800,000	도로포장 140a, 보도정비 80a 등	도로계획팀	연간단가
2	관내 이면도로 및 노후 계단 정비공사(연간단가)	500,000	목재데크 설치 8a, 화강판석 계단 23a 등	도로계획팀	연간단가
3	늘푸른길(1차구간) 도로환경 개선공사	400,000	아스팔트 정비 24a, 보도정비 4.5a 등	도로계획팀
4	성북로31길(예향재) 보행환경 개선공사	423,500	노후 보도정비(B=1~2m, L=580m)	도로계획팀
5	도로굴착 복구 정비공사(연간단가)	1,000,000	도로 포장(유관기관 등) 100a, 보도블록 정비 20a 등	도로굴착팀	연간단가
6	동소규모 주민생활편익사업(연간단가)	500,000	동소규모 포장 47a, 소규모 도로시설물 정비 1식	도로굴착팀	연간단가
7	도로 노면하부 공동조사 용역	460,000	도로하면 공동조사 238km	도로굴착팀
8	동소문로15길 외 2개소 도로정비공사	350,000	보도정비 12a, 도로정비 10a 등	도로굴착팀
9	월곡루나밸리아파트 일대 보행환경 개선공사	300,000	보도정비 12a 등	도로굴착팀
10	도로시설물 유지보수공사(연간단가,1권역)	1,162,000	도로포장 90a, 기타 도로시설물 정비 등	도로시설팀	연간단가
11	도로시설물 유지보수공사(연간단간,2권역)	1,121,000	도로포장 80a, 기타 도로시설물 정비 등	도로시설팀	연간단가
12	석관동 돌곶이 안심마을 도로환경 개선공사	700,000	도로포장 50a, 보도정비 8a 등	도로시설팀
13	오패산로3길 주변 노후 사각형거 보수공사	1,000,000	노후 사각형거 1.2km 단면보수 등	도로시설팀	국비
14	관내 불량맨홀 정비공사(연간단가)	150,000	불량맨홀(단차 등) 150개소	도로시설팀	연간단가
15	관내 과속방지턱 설치 및 도색공사(연간단가)	150,000	과속방지턱 재정비 90개소, 신설 30개소	도로시설팀	연간단가
16	포장도로 유지보수공사(연간단가)	1,500,000	도로포장 100a, 보도정비 30a 등	보도관리팀	연간단가
17	걷기편한 보행환경 개선공사(연간단가)	873,800	시도구간 보도정비 20a 등	보도관리팀	연간단가
18	횡단보도 턱낮춤 개선 정비공사	100,000	횡단보도 턱낮춤 및 유도블록 정비 80개소	보도관리팀
19	솔샘로 도로정비공사	500,000	도로정비 75a	보도관리팀
20	정릉초등학교 주변 보행환경 개선공사	250,000	보도정비 10a	보도관리팀
21	월곡로5길 보행환경 개선공사	581,000	도로포장 40a, 보도신설 7a 등	보도관리팀	국비
22	가로등 유지보수공사(연간단가)	264,000	가로등 6,093등 유지관리	도로조명팀	기발주
23	보안등 유지보수공사(연간단가,1구역)	250,000	보안등 6,388등 유지관리	도로조명팀	기발주
24	보안등 유지보수공사(연간단가,2구역)	250,000	보안등 6,552등 유지관리	도로조명팀	기발주
25	한천로 가로등 개량공사	380,000	가로등 38본, 분전반 4면, 노후선로 1.05km 개선, 광원교체(CDM150W→LED100W)	도로조명팀

Ⅲ		추 진 현 황

2022. 1. : ‘22년 성북구 건설공사 설계기준 및 지침서 작성

Ⅳ		향 후 계 획

2022. 2. : 공사 설계 및 발주

2022. 3. ~ 12. : 공사 착공 및 준공

※ 단일공사는 ‘22년 조기집행 계획에 의거 상반기 공사완료 예정

붙임 : 도로과 단일사업 위치도 1부.  끝.