문서번호	서울특별시차량정비센터-1356
결재일자	2022. 2. 14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
자동차정비팀장		차량정비센터소장
우영철		02/14 정인주
협 조
	주무관			임근식
	주무관			김진수
	주무관			정문성

2022년 자동차 정비시설 개량 및 관리계획

2022. 02.

서울특별시차량정비센터

2022년 자동차 정비시설 개량 및 관리계획

차량정비센터 자동차 노후 정비시설에 대한 개량 및 기전시설물 유지관리 계획을 시행하여 안전사고 사전예방에 만전을 기하고자 함

1		일반현황

□ 관련근거

○ 전기안전관리법 제11조(정기검사)

○ 전기안전관리법 제22조 및 동법 시행규칙 제25조(안전관리자의 선임 등)

○ 산업안전보건법 제17조 및 동법 시행령 제18조(안전관리자 업무 등)

○ 자동차관리법 제40조 및 동법 시행규칙 제68조(정밀도검사의 대상·기준등)

□ 기전설비 현황

○ 전기설비 현황 : 수전전압 22.9kV, 계약용량 750kW

특고압 변압기 (3대, 750KVA)	수배전반(13면)	저압분전반(82개)
∙220V3Ø : 300KVA ∙220V1Ø : 150KVA ∙380V3Ø : 300KVA	∙특고압변압기반 : 3면 ∙특고압 배전반 : 4면 ∙저압 배전반 : 6면	∙주 분전반 : 37개 ∙보조분전반 : 45개

○ 기계설비 현황

- 천장크레인 : 2.8톤 × 4대, 도장부스 2기, 세차 및 폐수처리장

- 대형리프트 2기, 중·소형 리프트 2기

- 제동력시험기외 2종 1SET, 전조등시험기 1대

- 공기압축기(콤프레샤) 9대

2		2022년 추진계획

□ 예산현황 : 496백만원(예산과목 : 시설비 및 자산취득비)

□ 추진사업 개요

예산 과목	구 분	사 업 개 요	사업비 (백만원)	사업기간
	합 계		496
시설비	소 계		402
	노후 전기설비(수전방식 변경)교체공사 실시설계용역	∙수전방식 변경 (22.9kV→380V) ∙간선전력케이블 및 분전반 전면개량	50	‘22.2.~7.
	대형 도장부스 교체	∙도장부스 실시설계 ∙도장부스 1기 교체	212	‘22.2~10
	정비고 천장크레인 교체	∙ 2.8톤 × 2대	60	‘22.2.~7.
	(변경) 노후 소화설비 교체공사	∙ 소화 저수조 및 소방펌프 교체 등	30	‘22.2.~7.
	(변경) 폐수처리장 노후설비 교체공사	∙약품투입설비 교체 등	50	‘22.2.~7.
자산취득비	소 계		94
	차량정비용 노후장비 교체	∙제동력시험기외 2종 ∙전조등 시험기1대 ∙4주식 리프트1대	74	‘22.2.~7.
	노후 냉난방기 교체	∙사무실 및 정비고 9대 (냉방기 4대, 냉난방기 5대)	20	‘22.2.~5.

○  사업별 발주계획 별도수립 시행

※ 일부 사업은 안전관리의 시급성이 요구되어 노후 설비 교체공사로 변경추진

□ 전기안전관리 대행 용역

○ 관련근거

- 전기안전관리법 제22조 및 동법 시행규칙 제25조(전기안전관리의 선임 등)

- 전기안전관리법자의 직무에 관한 고시(산업통상자원부 고시 제 2021–221호)

○ 시설규모 : 22.9kV 750kW

○ 과업기간 : ‘22.1.1. ~ 12.31.(1년간)

○ 주요 과업내용

- 전기안전관리자의 직무 수행 및 전기설비의 안전관리를 위한 확인․점검

- 전기설비의 안전관리에 관한 기록 및 보존 등

- 긴급상황, 장애발생시 신속한 보수조치  등

○ 소요예산 : 약 5.6백만원/년(사무관리비)

□ 특별고압 전기설비 요청검사 실시

○ 노후 특별고압 수배전반 및 변압기에 대해 1년 주기로 전문기관 검사를 시행하여 안전사고 사전예방

○ 시설규모 : 22,900V / 750KW

- 검사주관 : 한국전기안전공사(서울동부지사)

- 검사내용 : 특별고압 수전설비, 변압기 및 계전기 동작상태 정밀점검 등

○ 검사시기 : ‘22년 4월 중 (최근 검사일 ’21.4.10.)

○ 소요예산 : 약 1,1백만원/년(사무관리비)

□ 전기시설물 유지보수 연간단가 공사 (발주계획 별도수립시행)

○ 차량정비센터 전기시설물 유지보수에 대해 연간단가계약을 시행하여 유사시 신속히 복구하여 안정적인 차량정비사업 및 안전사고예방

○ 주요 공사내용

- 청사 및 정비고 노후 전선관 및 배선정비

- 노후 차단기 및 조명등 교체 등

○ 추진기간 : ‘22. 2. ~ ’22. 12

○ 소요예산 : 30백만원 (공공운영비)

□ 산업안전관리업무 위탁(대행) 용역

○ 관련근거 : 산업안전보건법 제17조(안전관리자) 및 제36조(위험성평가)

○ 시설규모 : 전기(22.9kV / 750kW) 및 정비시설(유해·위험기계기구) 등

○ 과업기간 : ‘22.1.1. ~ 12.31.(1년간)

○ 주요 과업내용

- 산업안전보건법에 의한 안전관리자업무 대행(월 2회이상 안전점검 및 교육)

- 산업안전보건법에 의한 위험성평가실시 (정기평가 1회 및 필요시 수시평가)

○ 소요예산 : 약 8백만원/년(사무관리비)

□ 기계·기구 정밀도검사 추진

○ 관련근거 : 자동차관리법 제40조 및 동법 시행규칙 제68조

○ 검사대상

- 제동력시험기, 사이드슬립시험기, 속도계시험기, 전조등 시험기

○ 검사일(예정) : ‘22. 8. (검사주기 1년마다)

○ 검사기관 : 한국교통안전공단

○ 소요예산 : 약 150천원/년(사무관리비)

□ 위험기계기구 안전검사 추진

○ 관련근거 : 산업안전보건법 제93조(안전검사)

○ 검사대상

- 크레인 4대, 압력용기1대, 전단기 1대

○ 검사유효기간 : ‘22. 1. 15.(검사주기 2년마다)

※ 안전검사 신청일 : ‘21.12.7.

○ 검사기관 : (사)한국안전기술협회

○ 소요예산 : 약 430천원/년(사무관리비).

붙임 : 기계설비 현황 1부.  끝.