투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(지연공정 만회대책 및 만회공정표 제출 통보)

1.업무지시현장 : 남부순환로(개봉1동사거리주변)평탄화공사 삼보굴착(주), 남부순환로(

개봉1동사거리주변)평탄화공사 주식회사 대한, 남부순환로(개봉1동사

거리주변)평탄화공사 주식회사 신성엔지니어링, 남부순환로(개봉1동사

거리주변)평탄화공사 주식회사 동일기술공사, 남부순환로(개봉1동사거

리주변)평탄화공사 주식회사 삼일기업공사

2.작 성 일 자 : 2022-02-14 13:02:44

3.지 시 내 용

가. 현재 『남부순환로(개봉1사거리 주변) 평탄화공사』의 진행이 예정공정표 보다 많이 지연되어 전체 공사준공에 차질이 우려되는바,

나. 지연공정에 대한 만회대책 및 만회공정표를 수립하여 2022.2.25(금)까지 제출바랍니다.

다. 또한 총차 9회 설계변경시 제출한 예정공정표 관리목표 공정에 의거 2022년 예산을 6월 전까지 조기집행하고 추경예산을 조기에 요청하여 2023년 12월말 준공기한 내 공사가 적기 준공 될 수 있도록 노력하여 주시기 바랍니다.  끝.

주무관							한상신			광역도로과장					02/14 신정
협조자
시행			토목부-2349									(						)		접수											(						)
우	04520					서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-3708-2556						/전송			02-3708-2599					/	hansang7272@seoul.go.kr												/	부분공개(5)