문서번호	물재생시설과-1598
결재일자	2022. 2. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	물재생기전팀장	물재생시설과장	물순환안전국장
곽윤석	최년수	김윤수	02/14 한유석
협 조
	데이터센터소장			추경수

『스마트 하수처리공정 인프라 구축』

통합 서버 및 상황실 구축 변경 추진계획

2022년  2월

물순환안전국

(물재생시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더 자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산·제시·분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념·성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

『스마트 하수처리공정 인프라 구축』

통합 서버 및 상황실 구축 변경 추진계획

물재생센터 공정운영의 체계적 관리를 위해 자료축적을 위한 통합 DB서버 및 처리공정의 원격감시를 위한 서버, 상황실 구축 용역의 추진중 물재생공단 노동쟁의 발생에 따른 통합서버 등 설치 위치변경 추진 보고임

Ⅰ		용역개요

▢ 건 명 : 스마트 하수처리공정 인프라 구축

▢ 용 역 사 : ㈜테크윈시스탬외 1개사(대표 김래진)

▢ 용역기간 : ‘21. 6. 24. ~ ’22. 8. 23.

▢ 계약금액 : 금1,702,923천원

▢ 용역내용

서울물재생시설공단·물재생센터 간 망연결 및 시스템표준화

빅데이터 확보를 위한 자동제어 DB인프라 구축

중단없는 물재생운영을 위한 온라인 원격 모니터링 플랫폼 구축

서울물재생시설공단 통합모니터링 상황실 구축

Ⅱ		그간 추진현황

▢ 20.10.20 : 스마트 하수처리공정 인프라 구축 추진계획

▢ 21.04.01 : 행안부 사전협의 등 사전절차 완료

▢ 21.06.09~24 : 제안서 평가 및 계약체결

▢ 21.07.29 : 착수보고회 개최

▢ 21.09.09 : 관계자회의(4개센터 8명) 개최

▢ 20.11.08 : 통합서버 및 상황실 구축 위치변경 검토보고

Ⅲ		통합서버 및 상황실 설치위치 변경 검토

▢ 변경검토(안)

통합서버 설치위치

구분	당 초	변 경
설치위치	탄천물재생센터 (공단본부) 제어상황실	서울데이터센터 백오피스

※ 통합웹 및 모바일앱 운영으로 효율적 통합감시가 가능하므로 통합상황실 미반영

구축내용(붙임 시스템 구성도 참조)

- 서버 구성목록 : WAS서버, 통합DB서버 각 2대, 빅데이터 서버 3대, 모바일 서버 3대, 중계서버 1대

▢ 위치변경 검토 추진현황

21.11. : 통합서버 및 상황실 구축위치 변경에 따른 검토의견 요청

- ㈜테크윈시스템, 중랑물재생센터 검토요청

21.11 : 중랑물재생센터 제어상황실 및 서버실 현장조사

- 현장조사자 : 물재생시설과 담당자, 중랑상황실 담당자(김동호), 용역사

- 현장조사결과

∘서버실의 통합설비 설치에 필요한 면적은 충분함

∘통합설비 설치시 중랑센터 상황실 제어설비 재배치 필요

∘상황실내 서버증가에 따른 비상전원용량 증설 필요

21.11~12 : 위치변경에 시스템 설치방안 검토(용역사)

- 서버실 및 통합상황실 설치장소 검토 및 설치안 작성

- 서버증가에 따른 중랑센터 전기용량 가능여부 검토

21.01.07 : 관계자 회의실시(중랑센터내)

- 참석자(8명) : 서울시 2명, 중랑센터소장외 3명, 용역사 2명

- 회의내용

∘통합상황실을 중랑물재생센터로 이전할 경우 통합상황실은 기존의 중랑센터 제어실과 별도공간으로 구성필요

∘통합서버 및 관제실 운영을 위한 별도의 인력 필요(전문인력파견 및 용역시행)

∘통합서버 및 관제실의 유지관리는 구축 주관부서(물재생시설과)에서 담당해야 함

- 회의결과 : 중랑물재생센터 이전 검토 협의중 도출되는 문제점 발생에 따라 통합서버 및 상황실 설치에 대한 재검토 필요

21.01.27 : 데이터센터 입주관련 사전협의 시행

- 참석자(10명) : 서울시 1명, 용역사 1명, 데이터센터 8명

- 회의내용

∘물재생센터 통합DB 시스템의 데이터센터 입주가능여부 협의

∘시스템 입주전 보안성 검토필요 및 시스템 구성 변경 필요

∘서버 구성 이중화 권장 및 서버 부품 이중화 권고

∘데이터센터 전산자원 활용 및 구매필요 품목 협의

- 회의결과

∘데이터센터 이전관련 보안성 검토 실시

∘서버 이중화 등 데이터센터 담당자 의견을 반영하여 추진

▢ 설치장소별 검토내용

설치 위치	데이터센터	중랑물재생센터	공단본부(탄천)
설치 방안	- 데이터센터내 서버구축 물재생시설과내 통합감시를 위한 상황판 LCD 설치 통합웹 및 모바일앱 운영으로 효율적 통합감시 가능하므로 통합상황실 미반영 시스템 유지관리 용역	- 통합상황실 별도 구축 (기존상황실과 분리요구) - 통합상황실 운영인력(2명) 필요 장비유지관리 용역 시행 시스템유지관리 용역 시행	- 기존 상황실내 구축가능 (구축시 사전협의완료) - 통합상황실 운영인력(2명) 필요 장비유지관리 용역 시행 시스템유지관리 용역 시행
장점	- 서버 등 시설유지관리 용이 (데이터센터 통합관리) - 센터에서 통합관리로 별도 운영인력 불필요 - 보안성 강화(해킹등 사이버테러에 즉시 대응)	- 직영체제 운영으로 상시 안전한 유지관리 가능 - 관리동 상시전력이 양호 공간확보 용이	- 탄천 및 공단관리 인력상주로 유지관리용이 인프라 구축시 사전협의 별도 협의 불필요
단점	- 서버접근 제한적 (별도 서버용 PC로 접속) - 장비구성에 따른 별도의 비용 소요 (데이터센터 운영관리에 필요한 전산자원 비용)	- 장비 및 상황실 유지관리 별도 인원(2명)필요 - 비상전원 부족으로 별도 예비전원확보 필요 향후 본관동 이전에 따른 서버실 이전비 추가소요 유지관리비용 과다소요	쟁의행위 등 돌발상황 발생시 서버유지관리 곤란 - 본부내 전력부족으로 별도 전기공사비 소요 공단 상황실 공간협소 유지관리비용 과다소요

▢ 설치장소 검토결과

당초 하수처리공정의 안정적이고 효율적인 관리를 위해 정보자원 통합대상 제외항목에 의거 물재생시설공단내 통합서버 및 상황실을 설치하는 것으로 계획하였으나 쟁의 행위 등으로 인한 통합서버 및 상황실 시스템 유지관리에 어려움이 예상되고,

향후 시스템의 고도화 및 용량 증설 등 확장성 등을 고려하여 중랑물재생센터내 통합서버 설치검토를 하였으나, 기존시설의 운영관리에도 어려움이 있어 센터 운영과 별도의 통합서버 및 상황실 등 유지관리를 위한 인력이 필요하다는 의견이 있어,

정보자원 통합기준에 따라 서버의 유지관리를 위한 별도의 인력이 필요 없고 해킹 및 사이버테러 등 대응에 효율적이고 유지관리가 유리한 데이터센터에 설치토록 추진하고,

물재생센터 전체적인 감시를 위한 상황판은 물재생시설과에 설치하고 통합상황실은 향후 필요시 설치검토.

Ⅴ		향후계획

▢ ‘22. 2월 : 정보통신 보안성 검토 요청(기시행, 22.2.9)

▢ ‘22. 2월 : 데이터센터 입주신청

▢ ‘22. 3월 : 과업변경 추진

Ⅵ		행정사항

▢ 관련 장비 입주관련 데이터센터 협조

▢ 통합서버 이전관련 과업변경내용 반영

붙임  시스템 구성도 1부.  끝.