문서번호	도시철도과-1546
결재일자	2022. 2. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	민자철도혁신팀장	도시철도과장
강인규	이강수	02/14 문혁
협 조
	실무사무관			조해준

신림선 개통대비 합동점검 추진계획 보고

2022. 02.

도시교통실

(도시철도과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

신림선 개통대비 합동점검 추진계획

신림선의 성공적 개통과 개통 직후 안정적인 운영을 위하여 분야별 주요 시설에 대하여 우이신설선 운영사 직원과 합동점검 하고자 함.

Ⅰ		추 진 개 요

□ 사업개요

❍ 사업구간 : 샛강역(9)~대방역(국철)~보라매역(7)~신림역(2)~서울대 앞

❍ 사업규모 : 연장 7.76㎞, 정거장 11개소, 차량기지 1개소

❍ 공사기간 : '17. 02. ~ '22. 05.(준공예정일 '22.05.26.)

**************************************

❍ 사업시행자 : 남서울경전철(주) / 사업운영자 : 로템SRS(주)

구 분	토목․건축․전기․기계․검수․궤도			신호․통신 (건설사업단)
	1공구	2공구	3공구
연장	2.286㎞	2.785㎞	2.689㎞	7.760㎞
구조물	정거장4개소, 환기구 1개소,터널2.041㎞	정거장 4개소, 환기구 3개소, 터널2.069㎞, 차량기지	정거장 3개소, 환기구 1개소, 터널2.404㎞	신호/통신
***	******	******	****	****
감리사	동부엔지니어링	유신, 수성엔지니어링	신성엔지니어링	신우이엔지, 예향엔지니어링
시 공 사	두산건설	DL이앤씨	한화건설	DL이앤씨

□ 추진경위

❍ '22.02.04. : 신림선 관리운영계획 보고회 시 도시교통실장님 점검 철저 지시

※ 우이신설선 개통 초기 발생한 장애 등 대처방안 적극 발굴을 위한 운영사 관점의 점검 필요

❍ '22.02.15.~02.28 : 도시철도과 합동점검(우이신설선 운영사 참여)

※ 도기본 주관 예비준공검사와 병행 실시(감리단, 외부전문가, 신림선 운영사)

Ⅱ		세부추진계획

□ 합동점검 계획

❍ 점검대상 : 신림선 전구간 분야별 주요 시설물

***************************************************

**********************************************

*********************************************************

❍ 점검일정

구 분	분 야 별	성 명	직 책	비 고
*********	***	***	****	***** ***
	**********************	***	****
*********	***	***	****
	***	***	****
*********	**	***	****
*********	***********	***	****
	***********	***	****

※ 현장점검 일정 및 우이신설선 운영사 점검인원은 여건에 따라 변동 가능

❍ 점검방법 : 분야별 서류․현장점검(도기본 부서별 점검일정과 동일)

❍ 중점 점검사항(주요 점검항목 및 분야별 점검표 별첨)

- 인수․인계 대상 시설물 적정 시공 여부 등

- 주요 시설물의 안전성 확보 등 적정 시공 여부

- 목적물의 품질 확보, 정상 가동 및 하자 발생 여부

❍ 주요 착안사항

****************************************************************

************************************************************

*************************************

**********************************************

******************************************

❍ 지적사항 조치계획

- 합동점검 지적사항은 도기본 및 시행자에게 개선․보완 요청

- 사업시행자 조치 후 분야별 감리단 확인결과 제출토록 안내

□ 향후일정

❍ '22.03~04. : 개통 대비 분야별 합동점검 지속 시행

- 환승역사 혼잡 대비 승하차 실제 상황 점검 및 시설물 연계성 점검

- 역사 주요 설비(비상게이트, 방범셔터, AFC, E/S, E/V 등) 구축 및 기능․작동상태 적정 여부 점검

- 금번 합동점검 미흡분야는 개선․보완 조치 및 필요시 추가점검 시행하여 신림선 도시철도의 안정적 개통 및 운영 기반 확보

❍ '22.04.~05. : 각종 안전사고 대비 비상대응계획 점검

❍ '22.05.~06. : 개통 전 비상대응 및 환승역 혼잡상황 대응 점검

Ⅲ		행 정 사 항

□ 이행사항

*********************************

***********************************************

************************

****************************************************

************************************

***********************************

*****************

****************************

붙임  1. 노선도 및 주요 시설물 설치현황 1부.

2. 점검표 1부.

3. 점검결과(제출 서식) 1부.  끝.

붙임 1

노선도 및 주요 시설물 설치현황

□ 노선도

□ 주요 시설물

구 분	주 요 시 설 물 현 황	비고
토 목	◦ 구조물 : 지하 정거장 구조물 11개소, 환기구 5개소 ◦ 본선 터널 : 터널 연장 : 6.514km
궤 도	◦ 본선 : 주행로 7.076km, 상하식 분기기 4틀 ◦ 차량기지 : 주행로 1.458km, 수평식 분기기 14틀	고무타이어 방식
건 축	◦ 지하 11개역(상대식 10개역, 섬식 1개역) ∙ 차량기지(지하1층, 중층) : 대지면적12,273.80m2 , 연면적 11,867.35m2 ∙ 종합관제동(지하 4층) : 대지면적3,935.12m2, 연면적 4,218.83m2
전차선	◦ 제3레일(궤조) ◦ 측면 접촉 방식 ◦ 비상전력 차단설비(BLS) 설치	제3궤조 방식
관제설비	◦ CTC(신호설비 원격제어, 차량운행표시 등) 1식 ◦ SCADA 시스템 1식 ◦ 기계설비 원격제어・감시시스템 1식 등
신 호	◦완전 무인우전 시스템(KRTCS) 적용 ∙ 관제・지상 ATP・연동・데이터 통신설비 ∙ ATP/ATO 차상설비 ∙ 전원설비・실외설비 등	KRTCS (한국형 차량제어시스템)
통 신	◦ 주전송설비 및 광통신 등 선로설비 ◦ 차량무선 시스템 : LTE-R 전송방식 ◦ 복합통신설비 : FM재방송, 지상파 DMB 등
차 량	◦ 3량 12편성(운행 10편성, 예비 2편성)

붙임 2

신림선 개통대비 점검표

중점 점검항목(분야별 점검표 별첨)

□ 차량 실내 및 외관 기기 등 취부 상태, 무인운전 안전설비

□ 차량 검사고 내 배수로 배수상태

□ 검수기계 장치 설치 및 장비 운용 등

□ 기계실 장비 취부 및 배선 상태

□ 전력공급시스템 및 변전, 전기실 설비 안전상태

□ 변전소, 전기실, 비상전원실 비상조명등 정상작동 여부

□ 통신장비(열차무선설비) 설치 상태 및 점검

□ 신호 자동제어시스템(ATP/ATO) 안정성 여부

□ 승강장안전문(PSD) 성능 및 안정성 여부

□ 역무자동화설비(AFC), 승강설비 등 역 시설물 성능 점검

□ 행선안내게시기, 자동안내방송장치 성능 및 상태 점검

□ 핸드레일, 점자블럭, 비상호출버튼 등 적정위치 설치 및 상태 점검

□ 기타 역사 시설물 안전관리 장비 설치 및 상태 점검(환기, 위생, 소방설비 등)