문서번호	민방위경보통제소-468
결재일자	2022. 2. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	경보운영팀장	민방위경보통제소장		서울종합방재센터소장
조경진	김성민	이권석		02/14 김선영
협 조
	자원관리과장		정진기
	장비관리팀장		채형석
	경보상황팀장		임종학
	담당자		정재각

노후 민방위경보 일제지령시스템 교체계획

2022. 2.

서울종합방재센터

(민방위경보통제소)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

- 신속․정확한 경보전달 및 안정적 운영을 위한 -

노후 민방위경보 일제지령시스템 교체 계획

민방위경보 상황실에 설치되어 운영 중인 민방위경보 일제지령시스템이 내용연수 경과로 노후 되고 운영체제 기술지원이 종료됨에 따라 교체 설치하여 안정적으로 경보발령 시스템을 운영하고자 함

Ⅰ		추진근거 및 배경

❍ 민방위경보통제소-101호(2022.1.11.)『2022년 주요업무 계획』

❍ 내용연수(6년~8년) 경과로 노후 되어 잦은 장애 발생

❍ 운영체제(윈도우서버 2008) 기술지원 중단(2020. 1. 14)

❍ 구형 시스템의 주요부품 공급 중단으로 유지관리 곤란

Ⅱ		교체대상 시스템 현황

❍ 대 상 : 민방위경보 일제지령시스템 및 통신장비 등 교체

장 비 명	대수	대수	내용연수	내용연수 품목
******	식	*	6	컴퓨터서버
**********	식	*	8	전신교환기
******************	식	*	8	오디오AD변환기
*****************	식	*	8	오디오AD변환기
*******	식	*	6	컴퓨터서버
********	식	*	8	오디오비디오콘솔
*******	대	*	7	오디오믹서
*******	대	*	8	네트워크라우터
**********	대	*	6	방화벽장치
*******	대	*	6	방화벽장치
******	대	*	7	네트워크스위치
*******************	식	*	7	데이터전송장치
*************	식	*	-
****	식	*	8	음향분배증폭기

❍ 민방위경보 일제지령시스템 구성도

※ 일제지령시스템 : 경보상황실에서 일시에 민방위경보단말176개소에 사이렌 스피커를 동시 작동시켜 음성으로 민방위경보를 발령하는 장비

Ⅲ		사업개요

❍ 사 업 명 : 노후 민방위경보 일제지령시스템 교체(구매설치)

❍ 사업기간 : 계약일로부터 85일

❍ 사업예산 : 금 332,400천원

❍ 사업 내용

- 일제지령 서버 및 일제지령 조작반 설치

- 일제지령 제어 및 운영 소프트웨어 설치

- 경보통제시스템과 일제지령시스템간 연계 소프트웨어 설치

- 주제어시스템과 일제지령시스템간 연계 소프트웨어 설치

- 중앙경보통제소와 시도 경보통제소간 연계 소프트웨어 설치

❍ 예산과목 : 재난관리시스템인프라구축, 서울종합방재센터운영,

민방위경보시설 확충 및 보수, 시설비(204-401-01)

❍ 계약방식 : 제한경쟁입찰(적격심사)

❍ 입찰참가자격 : 정보통신공사업 등록 및 소프트웨어사업자로 신고된 사업자로서 최근 5년 이내 민방위경보시설 납품실적 8천만 원 이상인 업체

Ⅳ		추진계획

❍ 사업계획 방침                 : 2022. 2. 10 ~ 2. 11

❍ 구매규격 사전공개             : 2022. 2. 14 ~ 2. 18

❍ 계약심사                      : 2022. 2. 21 ~ 3. 04

❍ 계약의뢰 및 입찰공고          : 2022. 3. 07 ~ 3. 25

❍ 적격심사 및 계약체결          : 2022. 3. 28 ~ 4. 01

❍ 납품설치 및 시험운영          : 2022. 4. 01 ~ 6. 24

❍ 검수 및 운영                  : 2022. 6. 27 ~ 6. 30

Ⅴ		행정사항

❍ 자원관리과에 설치업체 작업자 차량출입 및 주차장 이용협조

❍ 중앙민방위경보통제센터에 설치일정(절체작업) 협의 및 사전통보

❍ 코로나19 예방 조치(작업 중 수시 발열검사, 마스크 착용 등)