문서번호	토목부-2482
결재일자	2022. 2. 15.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
이회진		장종환	02/15 하현석
협조

- 창동 상계 동서간 연결교량(보행교 및 보차도교) 건설공사 -

설계변경(전체1회, 1차1회) 검토 보고

2022. 2.

도시기반시설본부

(토  목  부)

- 창동 상계 동서간 연결교량(보행교 및 보차도교) 건설공사 -

설계변경(전체1회, 1차1회) 검토 보고

창동 상계 동서간 연결교량(보행교 및 보차도교) 건설공사 설계변경

(전체1회, 1차1회) 및 공기연장 검토결과를 보고 드림

Ⅰ		근 거

○ 공사 설계변경(전체1회, 1차1회) 검토결과 보고(보행교)-감리부-22-00038(’21.01.14)

○ 공사 설계변경(전체1회, 1차1회) 검토결과 보고(보차도교)-감리부-22-00039(’21.01.14)

○ 물가변동(ES) 2차 승인 통보(창동상계 연결교량)-도기본-21-13836(‘21.12.31)

○ 물가변동(ES) 1차 승인 통보(창동상계 연결교량)-도기본-21-13646(‘21.10.27)

Ⅱ		보행교 건설공사

□ 공사개요

○  사 업 명 :  창동 상계 동서간 연결교량 보행교 건설공사

○  규    모 :  교량건설1개소 신설(연장 110.5m, 폭 10.0~15.0m)

○  사업기간 :  ‘21.04.19. ∼’24.04.18. (1차 ‘21.04.19.∼ ’22.04.18.)

○  도 급 비 :  ************************

○  시공사/건설사업단 : *****************************

□ 설계변경 사유

○ 물가변동으로 인한 설계변경

- 1회(조정기준일 : ‘21.06.22. 조정율 : 5.07%)

- 2회(조정기준일 : ’21.09.21. 조정율 : 3.28%)

○ 하천점용허가 행정절차 지연으로 1차공사 공기연장(28일 연장)

-  점용허가 신청일 : ’21. 07. 12.

-  하천점용 허가일 : ’21. 11. 12.(수방기간 ‘21.10.15이후 허가)

- 당초공기(1차) : ’21.04.19. ~ ‘22.04.18.

- 변경공기(1차) : ‘21.04.19. ~ ’22.05.16.

□ 설계변경 내역

○ 전 체 : *******************************************

○ 1  차 : *******************************************

(단위:천원)

구 분		당 초	변 경	증 · △감	비고
전체 (1회)	총공사비	**********	**********	************
	도 급 액	**********	**********	***********
	관 급 비	*********	*********	*
	공사기간	********** ***********	********** ***********	****
1차 (1회)	총공사비	*********	*********	************
	도 급 액	*********	*********	***********
	관 급 비	*******	*******	*
	공사기간	********** **********	********** **********	*********

Ⅲ		보차도교 건설공사

□ 보차도교 건설공사

○ 사 업 명 :  창동 상계 동서간 연결교량 보차도교 건설공사

○ 규    모 :  보차도교신설 : 폭 32.0m, 연장 118.0m

○ 사업기간 :  ‘21.04.19.∼’24.04.18. (1차 ‘21.04.19.∼’22.04.18.)

○ 도 급 비 : **************************

○ 시공사/건설사업단 : *******************************

□ 설계변경 사유

○ 물가변동으로 인한 설계변경

- 1회(조정기준일 : ‘21.06.22. 조정율 : 5.07%)

- 2회(조정기준일 : ’21.09.21. 조정율 : 3.28%)

○ 하천점용허가 행정절차 지연으로 1차공사 공기연장(28일 연장)

-  점용허가 신청일 : ’21. 07. 12.

-  하천점용 허가일 : ’21. 11. 12.(수방기간 ‘21.10.15이후 허가)

- 당초공기(1차) : ’21.04.19. ~ ‘22.04.18.

- 변경공기(1차) : ‘21.04.19. ~ ’22.05.16.

□ 설계변경 내역

○ 전 체 : ***********************************************

○ 1  차 : ********************************************

(단위:천원)

구 분		당 초	변 경	증 · △감	비고
전체 (1회)	총공사비	**********	**********	************
	도 급 액	**********	**********	************
	관 급 비	*********	*********	*
	공사기간	*********** ************	*********** ************	*****
1차 (1회)	총공사비	*********	*********	***********
	도 급 액	*********	*********	***********
	관 급 비	*	*
	공사기간	*********** ***********	*********** ***********	*********

Ⅳ		조 치 계 획

○ 건설사업관리단 설계변경 보고사항을 검토한 결과 물가변동으로 인한

설계변경 및 공기연장 사유가 적정한 것으로 판단되며

○ 상기 검토결과와 같이 설계변경(전체1회, 1차1회) 및 공기연장에 따른

변경계약을 시행 하고자 함.

※ 설계변경 자문대상 제외(설계변경자문위원회 운영 기준, ‘2013.12.17.)

금회 설계변경은 물량(수량), 단가 및 공종의 변경 없이 공사계약일반조건 제22조

(물가 변동으로 인한 계약금액조정)에 의한 것으로 우리 본부 설계변경자문위원회

운영 기준 제10조(설계변경자문 제외 대상)에 따라 설계변경 자문대상에서 제외

【제10조 제3항 - 법령 등 규정에 따라 지급하는 제경비】

붙 임 : 건설사업관리단 설계변경 검토 보고서 각 1부. 끝.