코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	준공 기한 연기 의뢰(양평1유수지 CSOs 저류조 유입수문 2중화 실시설계 용역)

1. 물순환정책과-2657(’22.2.15.)호와 관련입니다.

2. 우리 부서에서 추진 중인「양평1유수지 CSOs 저류조 유입수문 2중화 실시설계 용역」에 대하여 아래와 같이 준공 기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 양평1유수지 CSOs 저류조 유입수문 2중화 실시설계 용역

**********************************

*************************

라. 변경내용 : 준공기한 연기

구분	당초	변경
계약기간	2021.11.29. ~ 2022.2.18.	2021.11.29. ~ 2022.4.15.

마. 연기사유 : 준공기한 연기 의뢰서 참조

바. 지체상금 : 미부과

붙임  1. 준공기한 연기 검토보고 1부.

2. 연기 의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	물순환정책과장
주무관	박경리		수질관리팀장	정병권		물순환정책과장	02/15 김재겸
협조자	계약1팀장	代김혜영
시행	물순환정책과-2689	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서울시청 서소문별관 1동 (서소문동)	/
전화	02-2133-3771	/전송	02-2133-1041	/	snowhale76@seoul.go.kr	/	부분공개(5)