문서번호	정수시설과-899
결재일자	2022. 2. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
안전관리팀장		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
전준원		유통희	02/15 김훤기
협 조
	주무관			양은영
	주무관			김효영

대현산계통 송수펌프 건설폐기물 처리용역(2차) 발주계획

2022. 2.

뚝도아리수정수센터

정 수 시 설 과

대현산계통 송수펌프 건설폐기물 처리용역(2차) 발주계획

’21년 대현산계통 송수펌프 교체와 관련하여 설치공사시 발생한 건설폐기물 중 미처리된 잔여물량에 대한 처리용역을 추가 발주하고자 함

□ 사업개요

○ 용 역 명 : 대현산계통 송수펌프 교체공사 건설폐기물 처리용역(2차)

○ 용 역 비 : ***********

○ 용역기간 : 착수일로부터 10일이내

○ 용역규모 : 건설폐기물(혼합폐기물) 수집·운반 및 처리 1식

구 분	공 종	단 위	수 량	비 고
혼합폐기물	수집·운반	m3	*
	처리	Ton	***

□ 추진경과

○ ’21.10.14 : 기존 송수펌프 철거·해체 및 신설펌프 설치작업 실시

- 신설펌프의 크기에 맞추어 콘크리트 베드 철거 및 폐기물 외부반출

○ ’21.12.03 : 송수펌프 설치완료 및 시운전 실시(준공)

○ ’21.12.16 : 송수펌프 교체공사 건설폐기물 처리용역 발주

- 폐콘크리트 수집·운반 25m3 및 중간처리 57.5ton 처리용역 발주

○ ’21.12.24 : 건설폐기물 처리용역 처리물량 증가에 따른 검토실시

- 당초 계획된 처리물량 대비 폐기물의 추가물량 발생에 따른 조치방안 검토

→ 계약상대자와 설계변경 협의결렬에 따른 향후 별도발주 시행

※ 혼합폐기물의 수도권매립지 반입수수료 인상 및 폐기물 운반·처리와 관련한 제경비 인상에 따라 수급인의 설계변경 불응[관련근거 : 정수시설과-7134(’21.12.24.)호]

□ 발주계획

○ 계약방법 : 수의계약

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 1항 5호

※ 추정가격 2천만원 이하의 용역계약에 대한 사항으로 상기법령에 의거 수의계약하고자 함

○ 계약업체

구 분	도 급 자	대 표 자	소 재 지
수집·운반	*********	***	********************
처리	*******	***	****************

- 폐기물관리법 제25조 및 건설폐기물법 제21조 규정에 의거 건설폐기물의 수집·운반업과 건설폐기물의 중간처리업을 각각 득한 2개사 공동도급(분담이행)

※ 관련규정에 의거 수집·운반업과 중간처리업을 득한 업체 간의 자격보완을 통하여 과업수행

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 일반운영비, 지급수수료******************

붙임 1. 과업내용서 1부

2. 설계내역서 1부.  끝.