문서번호	방재시설부-1730
결재일자	2022. 2. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	조경시설과장	방재시설부장
이재미	현학범	전결 02/16 이동훈

「노들로 구조개선공사」

조경분야 실정보고 검토결과 보고

도시기반시설본부

(방재시설부)

「노들로 구조개선공사」

조경분야 실정보고 검토결과 보고

본 공사의 지장수목 제거 임목폐기물 처리비를 도급공사에 반영하는 실정보고 사항로 검토한 결과 타당하여 승인하고자 함.

※ 실정사항 : 임목폐기물 168ton 처리, 건설폐기물용역에서 도급공사로 변경

□ 보고개요

○ 보 고 자 : 책임건설사업관리기술인 신희종

○ 보고과정(시공사 → 건설사업관리단 → 본부)

□ 시공사) 실정보고 제출[하송노들 22-030호(2022.2.7.)]

□ 관리단) 실정보고 승인요청[노들건 2022-32호(2022.2.9.)]

○ 보고요지 : 임목폐기물 도급공사에 반영, 변경시 공사비 증감 등

※ 노들로 구조개선공사 개요

- 위    치 : 노들로(양화교~한강대교 남단)

- 공사기간 : 2021. 10. 25. ~ 2024. 1. 24.

- 총사업비 : 213억원(조경 167백만원)

- 시공사및감리사 : 하송종합건설(주)외1/(주)도화엔지니어링외2

□ 보고내용

○ 임목폐기물 처리비 도급내역에 반영

□ 임목폐기물(168ton)을 건설폐기물에 포함시켜 별도 발주항목으로 분류 설계

□ 관련법에 따라 5ton이상 임목폐기물은 건설폐기물에 미해당

※ 관련법 :『건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률』제2조제1호 및 동법 시행령 제2조(별표1)

□ 임목폐기물을 건설폐기물처리용역에서 도급공사로 변경하여 처리

**********************************************

**************************************

○ 조경분야 공사비 변경사항 : *******

(단위:천원)

구 분	당 초	변 경	증·감
*******	*******	*******	********

************************************

□ 검토결과

**************************************

***********************************************************************

□ 처리의견

○ 본 실정보고 사항이 타당하다고 판단되는 바, 승인처리하고 추후 설계변경에 반영하고자 함.

붙임 : 실정보고서(노들건 2022-38호) 1부.