문서번호	기반시설과-702
결재일자	2022. 2. 16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
정창수		이병철	02/16 박상보
협조

『양화대교남단 승강기 개선공사』

기존구조물 비계설치 외 3건에 대한 실정보고

2022. 2.

한강사업본부

(시  설  부)

『양화대교남단 승강기 개선공사』

기존구조물 비계설치 외 3건에 대한 실정보고

『양화대교남단승강기 개선공사』와 관련하여 기존구조물 비계설치 외 3건에 대한 현장여건 변동에 따른 실정보고임

□ 공사개요

❍ 공 사 명 : 양화대교 승강기 개선공사

❍ 위    치 : 영등포구 당산동 70-2일대(양화대교 남단)

❍ 공사기간 : 2021. 09. 15. ～ 2022. 12. 31.

❍ 공사개요 : 경사형 승강기 2기 철거 후 수직형 승강기 2기 신설

❍ 도 급 비 : 1,602,414천원

❍ 시 공 사 : 신성종합건설㈜ 대표자 이강용

□ 보고내용

❍ 보고경위 : 현장대리인 실정보고(신성22-24호, ‘22. 2. 10.)

① 현장이 협소하여 집토 불가하여, 중간집하장 필요

② 기존 구조물 철거(1, 2단계)시 분진방지시설 설치 필요

③ 가시설구간 안전난간 설치 내역 누락됨

④ 창고 및 사무실 사용기간 및 공간 협소로 추가 컨테이너 필요

❍ 실정보고 주요내용

① 토사 반출

○ 실정보고 사유

- 중간집하장 : 현장이 협소하여 집토 불가하며, 반경 10km이내 중간집하장을 구하기 어려움

- 순성토운반 : 주변 20km이내 사토장 구하기 어려움

○ 조치방안

- 중간집하 없이 사토장으로 반출 무대반입코자 함. (내역변경 없음)

- 사토장 : 김포시 월곶면 군하리 11-6 (거리 : 39km)

- 공사비 : 0천원 → 3,522천원(증 3,522천원)

② 기존구조물 철거시 비계 설치

○ 실정보고 사유

- 기존 구조물 철거(1, 2단계)시 분진방지시설 설치 필요

○ 조치방안

- 상하류 기존 구조물 철거시 강관비계 및 분진망 설치

- 공사비 : 0천원 → 6,986천원(증 6,986천원)

③ 가시설구간 안전난간 설치

○ 실정보고 사유

- 가시설구간 안전난간 설치 내역 누락

○ 조치방안

- 근로자 추락위험 대비 안전난간 및 승강계단 설치

- 공사비 : 0천원 → 2,961천원(증 2,961천원)

④ 창고 및 사무실 사용기간 및 공간 협소로 추가 컨테이너 설치

○ 실정보고 사유

- 창고 및 사무실 사용기간이 공사기간보다 짧음

- 사무실 공간 협소, 설계사 및 협력사등과의 회의 및 동절기 노무자 식사 공간 필요 ※설계기준(현장사무실 설치= 100㎡)

○ 조치방안

- 컨테이너형가설건축물(사무실, 창고) 사용기간 조정

- 컨테이너 (6m*3m) 추가 설치

- 공사비 : 1,423천원 → 3,062천원(증 1,639천원)

❍ 주요수량 증·감 검토

구 분	규 격	단위	수 량		증 , 감			비고
			당초	변경	수량		금 액
토공
순성토운반(토사)	BH0.6㎥+DT24T(L=20.0km)	㎥	346	0	346	감	4,259
순성토운반(토사)	BH0.6㎥+DT24T(L=39.0km)	㎥	0	346	346	증	7,782
2. 부 대 공
강관비계+분진망 설치 및 해체	기존 엘리베이터 철거	㎡	0	297.6	297.6	증	6,986
안전난간+안전망 설치 및 해체	가시설구간(φ48.6㎜)	m	0	107.2	107.2	증	2,141
경사형 가설계단 설치 및 해체	가시설구간(250X914mm)	㎡	0	7.36	7.36	증	742
비계주위 보호망 설치 및 해체	가시설구간	㎡	0	19.6	19.6	증	78
컨테이너형가설건축물(창고)	6*3.0m(6개월)	개	1	0	1	감	593
컨테이너형가설건축물(창고)	6*3.0m(24개월)	개	0	1	1	증	713
컨테이너형가설건축물(사무실)	6*3.0m(6개월)	개	1	0	1	감	642
컨테이너형가설건축물(사무실)	6*3.0m(24개월)	개	0	2	2	증	1,676
공사현황판		개	0	1	1	증	422
현수막		개	6	8	2	증	63

❍ 공사비 증·감 현황

(단위:원)

공 종	당초	변경	증액	비고
토공	211,894,595	215,416,529	3,521,934
2. 부대공	175,402,879	186,989,452	11,586,573
순공사비 계	938,238,422	953,346,929	15,108,507
제경비	518,501,578	524,867,127	6,365,549
공급가액	1,456,740,000	1,478,214,056	21,474,056
부가세	145,674,000	147,821,405	2,147,405
도급액	1,602,414,000	1,626,035,461	23,621,461

※ 협의율 적용 : 93.85%(기 승인 사항)

□ 검토 및 조치의견

❍ 현장대리인의 설계도서의 검토의견(토사반출, 비계설치, 가시설 안전 난간 설치, 컨테이너 추가 등)을 검토결과 적정하다고 판단되어 우선 공사 추진토록하고, 신규대가에 대해서는 향후 설계변경(협의율=93.85%) 시 반영하고자 함.

붙  임 : 양화대교남단승강기 개선공사 실정보고서(시공사) 1부. 끝.