문서번호	시설관리과-2814
결재일자	2022. 2. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		강서수도사업소장
하석주	양창진	유명은		02/17 신정철
협 조

『2021년 유량계 유지보수용역 (연간단가)』

추진실적 및 설계변경 계획

2022. 2.

강서수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『2021년 유량계 유지보수용역(연간단가)』

추진실적 및 설계변경 계획

우리사업소 유량계의 원할한 유지관리를 위하여 시행 중인 『2021년 유량계 유지보수 용역(연간단가)』와 관련 추진실적 및 설계변경 계획을 보고드림.

□ 용역개요

○ 계 약 명 : 2021년 유량계 유지보수용역(연간단가)

○ 계약기간 : 2021. 4. 1. ～ 2022. 3. 31.

○ 총 계약금액 : ******************************

○ 계약상대자 : ****************

○ 계약내용

- 아리수올림터, 배수지 유량계 점검 19개소

- 아리수올림터, 배수지 교정검사 19개소

- 유량감시시스템 DB추가 및 배수지 유출 데이터 추가 작업

- 수선자재교체 및 긴급 보수 등

□ 유량계 유지보수용역 추진 실적

차수	작업기간	작업내용	기성여부	비고
1차	2021.4.12. ~ 2021.4.28.	유량계 점검 2개소 교정검사(1000mm ~ 2000mm) 1건 사다리 설치 1건	기성완료
2차	2021.4.29. ~ 2021.5.12.	유량계 점검 19개소 배수펌프 교체 2개소 교정검사(1000mm ~ 2000mm) 1개소 압력전송계 교체 1개소	기성완료
3차	2021.6.2. ~ 2021.6.25.	유량계 점검 1개소 압력계 케이블 교체 작업 1건 압력신호변환기 교체 작업 1건	기성완료
4차	2021.6.2. ~ 2021.6.25.	마그네틱 및 모터보호 계전기 교체 교정검사(1000mm ~ 2000mm) 1개소 유량계 점검 19개소	기성완료
5차	2021.7.1. ~ 2021.7.15.	유량계 점검 1개소 교정검사(500mm 미만) 2개소 배수펌프 교체작업 1개소	기성완료
6차	2021.7.28. ~ 2021.8.6.	건식 센서 교체 1개소 파워보드 교체 1개소	기성완료
7차	2021.8.9. ~ 2021.8.23.	배수펌프 교체 1개소 유량계 명판 설치 3개소	기성완료
8차	2021.9.6. ~ 2021.9.17.	교정검사(500mm 미만) 5개소 교정검사(500mm ~ 1000mm) 1개소	기성완료
9차	2021.9.9. ~ 2021.9.13.	PLC 교체작업 1개소	기성완료
10차	2021.9.16. ~ 2021.10.13.	교정검사(500mm 미만) 1개소 유량계 DB(Data Base) 추가 1개소 유량계 건식 센서 교체 1개소	기성완료
11차	2021.10.18. ~ 2021.11.3.	교정검사(500mm 미만) 8개소 유량계 점검 19개소 건식센서 이설 작업 1개소	기성완료
12차	2021.11.2. ~ 2021.11.3.	교정검사(500mm ~ 1000mm) 1개소	기성완료
13차		목동배수지 유입유량계(KSM-9) 무선모뎀 설치	기성예정

□ 설계변경 검토내역

○ 설계변경 사유 : 제 13차 작업결과 물량 변동 발생

○ 설계변경 내용

- 계약기간 : 변동없음

- 총계약금액 : 변동없음

(단위 : 원)

구 분		변 경 전	변 경 후	증 ․ 감 액
총 용 역 비		**********	**********	-
1차수	‘21년 계약금액	**********	**********	-
2차수	‘22년 계약금액	*********	*********	-

구 분	공 종	비 고
물량 증가	무선모뎀설치 등 1건
물량 감소	건식 초음파 다회선 센서교체 등 2건

- 물량변동

□ 검토의견

○ 상기와 같이 유량계 유지보수 용역 시행 중 발생한 신규물량 및 물량 증감 건에 대한 설계변경을 위하여 『설계변경 심의위원회』를 개최하고자 하며,

○ 심의결과를 반영하여 행정지원과에 계약변경 의뢰.

붙임 :  1. 설계변경내역서 1부

2. 신규공종 및 물량증감 현황 1부

3. 작업지시내역서(1~13차) 1부.  끝.