문서번호	시설과-815
결재일자	2022. 2. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설과장
강성기		김현태	02/18 박종수
협조

위례 중앙수변 공원관리실 행정 정보통신설비

구매설치공사 준공기한 연기 검토 보고

2022. 2.

동부공원녹사업소

(시 설 과)

위례 중앙수변 공원관리실 행정 정보통신설비

구매설치공사 준공기한 연기 검토 보고

위례 중앙수변 공원관리실 행정 정보통신설비 구매설치 공사와 관련하여 준공기한 연기 검토 보고 드림.

□ 용역 개요

❍ 공 사 명: 위례 중앙수변 공원관리실 행정 정보통신설비 구매설치 공사

❍ 위    치: 서울 송파구 위례지구(위례수변공원 관리사무소)

❍ 사 업 비: **********************

❍ 사업내용: 행정망 네트워크 구축 및 전화통신 설치

❍ 계약기간: 2021. 12. 01.~2022. 2. 28.

❍ 계약금액: ***********

❍ 도 급 자: ***********

□ 준공기한 연기검토

❍ 검토사유 : 준공기한 연기

❍ 연기사유

- **********************************

*********************************

******************

❍ 준공기한 변경

- 당 초 : 2021. 12. 01 ~ 2022. 02. 28.

**********************************************

❍ 지체상금 부과 검토

- 지체상금 부과여부 : 미부과

□ 조치계획

❍ 계약부서에 변경계약(준공기한 연장계약)요청. 끝.