문서번호	건축부-2588
결재일자	2022. 2. 21.
공개여부	부분공개(5)

주무관	환경시설과장	건축부장			결재
이제관	백윤기	02/21 신명승
협 조
	주무관		고동석

- AI지원센터 건립공사 -

설계변경자문 소위원회 상정보고

문서번호	근정제2022-46	요청부서		환경시설과 (담당 이제관)	요청일			2022년02월17일
공 사 명	AI지원센터 건립공사
공사개요	공사규모		지하1층, 지상7층, 건물 1개동, 연면적11,118.25m2/교육연구시설, 제2종 일반주거지역
	공사기간		2021년 05월 14일 ~ 2023년 04월 13일
	감 리 사		㈜근정종합건축사사무소외 2개사
	설 계 사		에스피티엠제이 건축사 사무소
	시 공 사		대라수건설(주)
자문 안건명			AI지원센터 건립공사 설계변경				요청금액		************
자문요청사유			5,000만원 이상 변경사항 □ 부서(담당별) 간 조정·통합이 필요한 경우
설계변경 유형			▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ☑ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ☑ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ▢ 유지관리, 사용부서 요구 ☑ 설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ▢ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 사전협의 미흡 ▢ 기타(유관기관 요청사항)
설계변경사항(요약) ○ 복공가시설 반영 및 복공 부위 가시설 변경, 사토장 거리 변경 등
토목감리자 의견(요약) ○ 설계변경에 대하여 검토한 결과 적정함
주 요 변 경 내 역 및 공 종
◼ 변경 개요 - 복공가시설 반영 및 복공 부위 가시설 변경 - 사토장 거리변경(당초 15.0KM → 변경 34.9KM) - 캡빔콘크리트 삭제 / 토류판 설치 - 제자리콘크리트말뚝 정재하시험 추가 - RAKER BLOCK 콘크리트 수량 오류 물량증감내역 (내역서 참조)						**************** *********************** *********************** ******************** ******** *************** ********** ****************** ****************
별첨서류	1. 감리단 검토보고서 사본 1부 2. 실정보고서 사본 1부. 3. 설계변경내역서 1부.					▪ 공사 예정시기 2021. 12 ~ 2022. 03

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	AI지원센터 건립공사
계약금액	****************	***	***********	시공사	대라수건설(주)
공사기간	2021.05.14.~2023.04.13.	협의률	******	설계자	에스티피엠제이 건축사사무소
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사( )			감리자	㈜근정종합건축사무소 외 2
공사규모	지하1층, 지상7층, 건물 1개동, 연면적11,118.25m2/교육연구시설, 제2종 일반주거지역			작성자	***********************

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	변경도서 참조		변경도서 참조
공 사 비	1********************* *********************		1***** 6,123,768,000원 ******13,094,576,310원	1******306,768,000원 ******306,768,000원
적 용 요 율	- 신규비목단가(계약상대자의 책임 없는 사유로 인한 경우 포함) : 설계변경 당시를 기준으로 산정한 단가 * 협의율 91.25% 적용 (100%+82.5%)/2 - 계약단가
설계변경요구자	▢ 발주처 ☑ 계약상대자
협의율 적용 근거	- 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제7절 1의 나항
설계변경 근거	방침 (실정보고 승인)	업무연락전-21-16785(2021.12.30. 실정보고 승인) - 가시설 및 사토장 변경 에 따른 실정보고 승인 업무연락전-22-1596(2022.02.14. 실정보고 검토 및 승인) - RAKER BLOCK 콘크리트 수량 오류 실정보고 승인
	관련규정	공사계약일반조건 제6절 및 공사계약 특수조건 제12조, 제14조
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②민원해결, 보수, 보강 ③문화재 및 지장물 이설 ④ 현장여건 상이 ⑤ 유지관리, 사용부서 요구 ⑥설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ⑦공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑧제도, 기준변경 ⑨유관기관 사전협의 미흡 ⑩ 기타(유관기관 요청사항)

설계변경 내용	1. 실정보고 승인 5건 (외부 전문가 자문 및 현장 여건 반영 등) *****************
효 과	① 공기단축( 월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행여부	☑ 이행 □ 미이행

□ 관련문서

• 발주처 실정보고 승인문서 각 1부 등

설계변경 자문위원회  귀중