문서번호	시설관리과-3203
결재일자	2022. 2. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
차승환	이승영	02/21 조임남
협 조
	주무관		조익승

사토장 변경 요청에 따른 검토보고

2022. 2.

남부수도사업소

(시설관리과)

사토장 변경 요청에 따른 검토보고

『2021년-2차 동작, 영등포구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사』의 사토장 변경 요청건에 대해 검토 후 결과를 보고드림

□ 공사현황

○ 공 사 명: 2021년-2차 동작, 영등포구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사

○ 공사위치: 동작, 영등포구 관내

○ 시공업체:**************

○ 감리업체:*****************

○ 공사개요: 제수변정비 180개소, 변실정비 76개소

□ 실정보고 내용

○ 현황 및 문제점

□ 수도권매립지 관리공사기준에 따른 토사반입불가로 이에 따른 발생토처리가 가능한 대체 사토장 선정 처리가 요구됨.

○ 대책 및 보고자 의견

□ 공사에의해 발생되는 토사에 대한 사토장 선정

∙ ****************************

□ 사토장 변경에 따른 운반거리 변경

∙ 변경거리 : **************************

□ 사토장 운영조건(개발행위허가필증, 토사반입동의서, 토지대장)

□ 계약단가 : *******

□ 조치의견

○ 위 현장실정 내용과 같이 수도권매립지에서 토사반입 불가에 따른  개발행위허가 및 토사반입 동의를 취득한 ******************************************************************************************* 판단되며,

○ 공사장 안전관리 및 적법한 사토처리가 될 수 있도록 ************에 회신하여 공사에 만전을 기하도록 통보하고자 함.

붙 임 : 사토장 변경 제출 공문 1부.  끝.