문서번호	공원녹지과-2878
결재일자	2022.2.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		공원팀장		공원녹지과장		도시관리국장
장재원		차윤정		석승우		02/21 김영식
협조
	하천녹지팀장		심재호

★ ◉

2022년 미세먼지 차단숲 조성사업 추진계획

성   동   구

2022년 미세먼지 차단숲 조성사업 추진계획

우리구 중랑천 제방 및 둔치 산책로 주변에 수목식재를 통한 미세먼지 차단숲을 조성하여 미세먼지 저감과 동시에 도시 열섬현상을 완화하여 쾌적한 생활환경을 제공하고자 함

Ⅰ		추진방향

□ 하천 산책로변 낙엽활엽수 그늘목 식재로 하천이용환경 개선

□ 다열․다층식재를 통해 미세먼지 저감 및 열섬현황 완화

□ 지역 환경 및 미세먼지 차단 효과를 고려한 수종 선정 및 식재

Ⅱ		사업개요

□ 사업기간 : 2022. 2. ~ 12.

□ 위    치 : 중랑천

□ 규    모 : 1ha

□ 소요예산 : 1,000백만원(국 500 / 시 500)

□ 사업내용 : 수목식재를 통한 미세먼지 차단숲 조성, 주민편의시설 설치 등

Ⅲ		세부 추진계획

□ 실시설계용역

○ 기    간: 2022. 2. ~ 6.

○ 소요예산: 55백만원

※ 기술용역타당성 심사 결과에 따라 조정될 수 있음

○ 과업내용: 현황여건 분석, 설계도서 및 심의자료 작성, 적정 공사기간 산정 등

○ 계약방법: 수의계약

○ 자격요건:「산림기술 진흥 및 관리에 관한 법률」시행령 제12조 제2항 별표4에   따른 종합업, 녹지조경업으로 등록한 산림기술용역업

○ 관련근거: 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호

○ 수의계약사유: 입찰공고 등 행절절차에 소요되는 기간을 최소화하여 사업을 연내에 완료하기 위함

□ 하천수리계산용역

○ 기    간: 2022. 3. ~ 6.

○ 소요예산: 30백만원

※ 기술용역타당성 심사 결과에 따라 조정될 수 있음

○ 과업내용: 유역 특성조사, 식재배치계획 타당성 및 홍수위 영향 검토, 보고서 작성 등

○ 계약방법: 수의계약

○ 관련근거: 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호

○ 수의계약사유: 입찰공고 등 행절절차에 소요되는 기간을 최소화하여 사업을 연내에 완료하기 위함

□ 시설공사

○ 기    간: 2022. 7. ~ 10.

○ 소요예산: 915백만원

○ 계약방법: 지역제한입찰

○ 입찰참가자격

-「도시숲법」제15조 및 부칙 제1조에 따라 도시숲등 조성업을 등록한       산림사업법인, 산림조합(중앙회)

-「건설산업기본법령」에 따른 조경공사업, 조경식재공사업, 조경시설물설치    공사업에 등록한 업체

Ⅳ		추진일정

□ 2022.02. ~ 06. : 조경설계용역 및 하천수리계산용역 시행

○ 하천점용허가, 市 설계심의및 계약심사 등 행정절차 포함

□ 2022.07.        : 공사발주 및 계약

□ 2022.08. ~ 10. : 공사착수 및 완료

붙  임 : 위치도 및 현황사진 1부.  끝.