문서번호	시설보수과-1394
결재일자	2022. 2. 22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	서부도로사업소장
이이용		안준수	02/22 김영철
협 조
	기전과장			최경주
	주무관			김종성
	주무관			곽영두

『2022년 풍수해 대비』

수방시설 및 수해취약지역 일제점검·정비계획

2022.02.

서부도로사업소

(시설보수과)

『2022년 풍수해 대비』

수방시설 및 수해취약지역 일제점검·정비계획

2022년 풍수해 대비 수해취약시설인 지하차도, 복개구조물, 터널 등에 대해 사전 일제점검을 시행하여 적출사항에 대한 일제정비로 수해예방에 만전을 기하고자함.

Ⅰ		관 련 근 거

▢ 2022년 주요 수방대책 추진계획(하천관리과-1831 ‘22.2.9)

▢ 2022년 풍수해 대비 수방시설 및 수해취약지역 일제점검 시행

※ 하천관리과 - 2203(2022. 2. 17)호와 관련임.

Ⅱ		점 검 대 상

▢ 풍수해 취약시설 : 22개소                     (단위:개소)

계	지하차도	복 개	터 널	비 고
22	12	4	6	-

Ⅲ		추 진 계 획

▢ 점검 및 정비기간 : 2022. 2. 28 ~ 2022. 4. 30

점검계획 수립방침 및 대상파악 제출 (2.28까지)	⇒	1차점검 시행 (3.2~3.31)	⇒	지적사항 보완조치 (3.10 ~ 3.31)	⇒	조치결과 제출 (4.4일까지)	⇒
2차점검 시행(미조치사항) (4.5 ~ 4.22)	⇒	지적사항 정비완료 (4.12 ~ 4.30)	⇒	조치결과 제출 (5.9일까지)

▢ 단계별 점검 및 정비

【1차점검 및 정비】

○ 점검 및 정비기간 : 2022. 3. 2 ~ 3. 31

○ 점검대상 및 점검자 : 총 22개소, 8명

- 지하차도 : 12개소(강제배수 5, 자연배수 7)

구 분	시설명	가동방법	펌프시설	점검자		비 고
				직급	성 명
지하차도	퇴계로	강제배수	10HP×3 7.5HP×3	전기9급 시설6급	주현탁 송유진
	서빙고		20HP×27.5HP×1	전기9급 시설7급	주현탁 전휘기
	성 산		15HP×3	전기8급 시설7급	곽영두 전휘기
	증 산		40HP×2 50HP×1	전기8급 시설6급	곽영두 송유진
	모래내		15HP×3 5 HP×1	전기8급 시설6급	곽영두 이이용
	연 희	자연배수		전기운영6급 시설6급	김상호 이이용
	의주로			전기운영6급 시설6급	김상호 김종성
	이태원			전기운영6급 시설6급	김상호 김종성
	잠수교 북 단			전기운영6급 시설6급	김상호 김전수
	신 사			전기운영6급 시설6급	김상호 김전수
	남산2호			전기운영6급 시설7급	김상호 전휘기
	두무개			전기운영6급	김상호	기전시설 부분담당

- 복  개 : 4개소(완전복개)

구 분	시설명	점검자		비 고
		직급	성 명
복 개	불광천복개 1	시설7급	전휘기
	녹번천 복개	시설6급	김종성
	욱천복개 1	시설6급	김전수
	욱천복개 2	시설6급	이이용

- 터  널 : 6개소

구 분	시설명	점검자		비 고
		직급	성 명
터 널	남산1호터널	시설6급	송유진
	남산2호터널	시설7급	전휘기
	남산3호터널	시설6급	이이용
	월드컵터널	시설6급	김종성
	금 화 터 널	시설6급	김전수
	봉 산 터 널	시설6급	김전수

○ 점검사항

- 지하차도 배수펌프(발전기) 및 배수로 점검

- 복개시설 내부 유수지장물 및 토사퇴적물 적치 여부

- 터널시설 배수로에 이물질 퇴적 및 토사유출 여부 등

○ 정비계획

- 경미한 사항은 현장에서 즉시 정비조치

- 배수로 및 집수정 준설토 퇴적은 직영반 또는 2022년 도로시설물      일상 유지보수공사 업체에 통보하여 준설시행

- 복개시설 내부에 유수지장물 적출시 해당 자치구에 통보

- 중대한 결함으로 구조물 안전에 영향이 있을시 전문가 의견 포함

정비계획 수립

【2차점검 및 정비】

○ 1차 점검시 미조치사항 위주 집중점검

○ 점검기간 : 2022. 4. 5 ~ 4. 22

- ‘22년 4. 30일까지 1·2차 점검 시 지적사항 정비완료

※ 우기전 정비가 곤란할 경우 별도 정비계획 수립 시행

Ⅳ		행 정 사 항

▢ 점검대상 지적사항 및 조치결과 제출(하천관리과)

○ 방침서 및 점검대상 제출                  : 2022. 2. 28일한

○ 1차 점검 지적사항 및 조치결과 제출      : 2022. 4. 4일한

○ 2차 점검 지적사항 및 조치결과 제출      : 2022. 5. 9일한

▢ 중대한 결함사항 조치

○ 구조적 균열, 붕괴, 전도 등 이상징후 발견된 시 응급조치 및 대책마련

붙임 : 1. 시설물 점검조사표 1부.

2. 수방시설 및 수해취약지역 일제점검· 정비계획 공문 1부.  끝.