투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	관급자재 계약취소 의뢰 [신림공영차고지(저류조포함) 건설 전기공사]

1. 설비부-2127(2022.02.21)호 관련입니다.

2. 우리 부서에서 시행 중인 「신림공영차고지(저류조포함) 건설 전기공사」의 관급자재(터널등기구 외 3종)를 아래와 같이 계약취소 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 계약취소 내역

납 품 요구번호	물 품 식별번호	모델명	단위	계약금액	계약자	비고
12-21-1 -75899-00	23527965	(CI-OTLPEX-57C50T SM50W)	개	2,988,000원	주식회사 천일	계약취소 후 재구매 예정
	23527966	(CI-OTLPEX-57C50T2 SM50W)	개	2,128,000원
12-21-1 -75900-00	23163358	(CI-OFDO- 57C100DC 100W)	개	64,468,000원
	23415148	(CI-OHFD- 57C400N 400W)	개	10,560,000원

나. 사유 : 물품 다수공급자계약 특수조건 규정(납품취소) 및 선행공정(건축) 지연

붙 임 : 1. 관련방침서 1부.

2. 합의서 각1부.  끝.

	설비부장
주무관	임현철		도로설비과장	문학준		설비부장	02/22 김호성
협조자
시행	설비부-2245	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미어 플레이스빌딩 15F	/	http://seoul.go.kr/
전화	02-3708-8636	/전송	02-3708-8659	/	chulking@seoul.go.kr	/	부분공개(5)