문서번호	기반시설과-825
결재일자	2022. 2. 23.
공개여부	부분공개(6,7)
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
김일문		이병철	02/23 박상보
협조

『난지천횡단교량설치공사』

가도설치외2건 검토보고

2022. 02.  .

한강사업본부

기반시설과

『난지천 횡단교량 설치공사』

가도설치외2건 검토보고

『난지천 횡단교량 설치공사』추진중 난지천 횡단 가도설치외 2건의 실정보고에 대한 검토보고 임.

□ 공사개요

❍ 위    치 : 마포구 상암동 난지한강공원(가양대교북단하부)

❍ 사업기간 : 2021.9. ～ 2022. 08

❍ 시설개요 : 교량설치 폭 5.5m 연장 53m(DB 24)

❍ 도 급 비 : 1,769,997천원

❍ 시 공 사 : ㈜ 삼천리ENG

□ 현황 및 문제점

❍ 가도설치

- 현 황 : 당초 설계시 중장비,공사용트럭등 중차량등이 기존 난지교를 이용하는 것으로 설계됨.

- 문제점 : 난지교(1993년준공)에 대하여 검토한바 설계하중이  (DB18(32.4톤)으로 검토되어 사용중인 장비의 자중(파일장비-44톤,크레인-43톤)과다로 난지교 이용시 교량의 손상,붕괴등의 우려.

❍ 항타기 지조립 작업공간 부족 및 평탄성 검토

- 현  황 : 당초 설계시 항타기 조립장의 위치가 경사(기울기16%)로 설계됨.

- 문제점 : 설계대로 시행시 경사 및 항타장비(항타기+리더기) 조립부지  협소(최소 L=50m 확보필요)로 항타장비 조립 불가.

❍ 기초파일 항타시 공사공 설계누락

- 하부구조(교대,교각) 설치를 기초말뚝 시공시 성토구간 상부에서   말뚝 선시공이 필요하나 성토구간의 높이만큼 공삭공 설계누락.

(설계사검토의견)

□ 검토의견

❍ 가도설치

⇒ 기존난지교의 노후 와 설계하중(DB-18)으로 이용 불가함에 따라 가도설치가 필요하며, 난지천 유수소통을 위하여 하수관로(D=1200mm   5열을 설치하여 거더설치까지 사용하고 5월말 철거.(철거후 신설교량 이용)

❍ 항타기 지조립 작업공간 부족 및 평탄성 검토

⇒ 항타장비 조립공간 부족 및 가도축조구간 경사로 인하여 항타기 이동시 전도등의 사고위험이 있음에 따라 추가 성토 및 평탄성 확보필요

❍ 기초파일 항타시 공사공 설계누락

⇒ 기초 말뚝 항타시 상부 성토구간 에서 말뚝 선시공이 필요함에   따라 공삭공 필요

□ 시공물량 및 공사비검토

공 종	규 격	단위	수 량			공 사 비(천원)
			당 초	변 경	증·감	당 초	변 경	증·감
합 계						121,971	230,992	109,021
도급비						112,387	211,904	99,517
제경비						42,152	78,476	36,324
성토및다짐	BH0.6㎥+ DT24	㎥	1,425	2,765	증1,340	60,739	88,103	증27,363
흄관부설	D=1200mm	m	56	125	증69	8,859	19,776	증11,551
말뚝천공 (공삭공)	∅508	m	-	346	증346	-	24,278	증24,278
관급비	흄관 (D=1200mm)	본	25	25	25본	9,584	19,088	증9,504

□ 조치의견

- 실정보고 및 설계사 의견 검토한바 적정한 것으로 사료되어 조속시행하고 우기전 교량 거더 설치 후 가도 철거하여 여름철 우기시 유수  소통에 지장이 없도록 하고,

- 보고된 수량에 대하여는 추후 설계변경시 정산시행

- 단가적용은 낙찰율 적용(87.495%)

붙  임 : 실정보고 1부. 끝.