문서번호	운영과-1380
결재일자	2022. 2. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	중랑물재생센터소장
임정주		최영효	02/24 최규동
협조

유입동 3처리장

세목스크린 및 컨베이어벨트 긴급정비 계획

2022. 2.

중랑물재생센터

(운영과)

유입동 3처리장

세목스크린 및 컨베이어벨트 긴급정비 계획

유입동 3처리장 세목스크린2호기 고장과 노후화된 컨베이어벨트 긴급정비 필요한바, 신속한 정비로 수질관리의 기능을 정상화하여 관리코자 함.

긴급정비 배경

○ 세목스크린 시설의 노후화 등에 따른 2호기의 고장으로 긴급정비하여 조기에 정상화 시킬 필요성 있음.

○ 협잡물 컨베이어벨트 노후화에 따른 예방정비 요구됨.

○ 고장내용

구분		고장내용		비고
유입동 세목스크린	2호기	체인, 스프라켓 고장 어테치먼트 고장
유입동 컨베이어벨트	협잡물	갈매기벨트, 각 드럼 노후화

2. 긴급정비 계획

□ 정비계획

○ 사 업 명 : 유입동 세목스크린 긴급보수

○ 사업기간 : 2022.3.2. ~ 4.30.(60일)

○ 사업내용 : 유입동 세목스크린2호기 및 컨베이어벨트 보수

○ 계약업체 : *******

○ 계약방법 : **********

- 지방계약법 시행령 제25조 1항 5호 마목 1

○ 수의계약사유

- 해당업체는 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 25조 규정에 해당되고, ***************************************** *************************************

○ ******************

- 예산과목 : (중랑물재생센터 운영(자본))

중랑물재생센터 수처리 유지보수(자본), 수처리분야 기계설비 유지보수,                     시설비및부대비, 시설비

□ 정비내용

구 분	주 요 개 선 내 용	비 고
유입동 세목스크린(2호기)	○ 체인, 레이크 프레임	긴급보수
유입동 컨베이어벨트(협잡물)	○ 갈매기벨트, 헤드드럼, 테일드럼, 스냅드럼, 케리어롤라, 리턴롤라

3. 추진일정

○ 2022. 2.        : 계약의뢰

○ 2022. 3. ~ 4.  : 긴급보수

○ 2022. 4.        : 완료

붙임 : 유입동 세목 및 컨베이어벨트 긴급보수 설계내역서  1부.  끝.