문서번호	급수운영과-3506
결재일자	2022. 2. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장		동부수도사업소장
황대룡	권기섭	유동수		02/24 이재호
협 조

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다.”

도로 굴착복구공사 발주계획 보고

(2022년 동부수도사업소 관내 포장도로굴착복구공사)

2022. 2.

동부수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

도로 굴착복구공사 발주계획 보고

(2022년 동부수도사업소 관내 포장도로굴착복구공사)

2022년도 우리 사업소 관내 상수도공사에 따른 포장 도로 굴착복구공사 장기계속단가 계약 발주 계획을 보고 드림.

Ⅰ		2021년 포장복구공사 계약 현황

○ 공사명: 2021년 동부수도사업소 관내 포장도로복구공사(장기계속공사)

○ 게약자: ******************

○ 계약금액: **************

○ 계약기간: 2021. 4. 16.~2022. 5. 31.

○ 2021년 포장복구공사 계약 및 정산 현황

(2022.  1. 현재)

계약금액 (백만원)	기정산금액 (백만원)	잔액 (백만원)	비 고
*****	******	****

Ⅱ		2022년 굴착공사 예정 현황

○ 굴착공사 및 직접복구비 예상금액                                                                                     (단위: 백만원)

연 번	구 분	현 황		비 고
		예산액	예상직접복구비
	계	25,426	3,358
1	배급수관정비공사	7,957	1,193	15%
2	시설물 정비공사	2,415	120	5%
3	누수복구공사	5,700	855	15%
4	블록시스템 구축	4,254	425	10%
5	수탁급수공사 등	5,100	765	15%

Ⅲ		2022년 포장복구공사 발주계획(안)

○ 2022년 포장복구공사 발주계획(안)

- 공사명: 2022년 동부수도사업소관내 포장도로굴착복구공사(장기계속단가계약)

- 공사지역: 동부수도사업소 관내

- 공사개요: 도로포장 314a(아스팔트 291a, 콘크리트 6a, 보도 14a)

- 공사기간: 착공일로부터 ~ 2023. 5. 31.

- 발주예정 금액(도급비): 3,300백만원(설계심사 요청액: 3,830백만원)

※ 발주예정 금액은 본부 설계심사 결과에 따라 변동예정

Ⅳ		계 약 방 법

○ 관련근거: 「지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한법률」제24조(장기계속계약)

○ 입찰방법: 공개경쟁입찰(긴급공고)

○ 예정물량 산출: 총 예정물량은 장기계속계약 절차에 따라 2019~2021년

까지 3개년 평균치를 산출하여 전체 설계물량으로 예상하여 산출

Ⅴ		향후 추진계획

○ 본부 설계심사요청 요청: 2022. 2.

○ 본청 일상감사 검토 의견서 요청: 2022. 3.

○ 계약의뢰: 2022. 3.

○ 입찰공고: 2022. 3.

○ 공사계약 및 착공: 2022. 4.

붙임  1. 설계내역서 1부.

2. 물량산출서 1부.

3. 긴급 공고 사유서  끝.