투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	공사 중지에 따른 변경계약 의뢰(염창나들목 리모델링 공사 계측관리 용역)

우리부서에서 추진중인 『염창나들목 리모델링 공사 계측관리 용역』과 관련하여 아래와 같이 준공기한을 연기 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 용 역 명 : 염창나들목 리모델링 공사 계측관리용역

2. 계약금액 : 총차 106,659,990원(1차 53,328,000원)

3. 계 약 자 : 주식회사 영화키스톤건축사사무소 대표 김 주 열

4. 준공기한 연기사유 및 내역

가. 사   유 : 하천점용허가 처리절차 지연 및 수방기간 도래에 따른 절대공기 부족

나. 준공기한 연기 내역

구분	계약기간		비고
	당초	변경
총차	2021.9.3. ~ 2022.9.2.	2021.9.3. ~ 2023.6.30.	계약금액 변경없음
1차	2021.9.3. ~ 2022.4.30.	2021.9.3. ~ 2022.12.31.

다. 지체상금 : 미부과

라. 귀책사유 : 한강사업본부

붙임  1. 관련 방침서 1부.

2. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

3. 변경 합의서 1부.  끝.

	치수과장
주무관	김태규		치수과장	02/24 代이성연
협조자	주무관	안미희
시행	치수과-852	(		)	접수		(		)
우	04770	서울시 성동구 강변북로 257(성수동1가 642-25)	/
전화	02-3780-0651	/전송	02-3780-0744	/	mgsilang@seoul.go.kr	/	부분공개(5)