투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신	공원운영과장
(경유)
제목	문화비축기지 매점 신축 냉난방기 설치 납품기한 변경 시행

시설과-1331(2022. 2. 24.)호와 관련, 『문화비축기지 매점 신축 냉난방기 설치』에 대하여 다음과 같이 납품기한을 변경하고자 합니다.

1. 건    명: 문화비축기지 매점 신축 냉난방기 설치

2. 요구번호: ****************

3. 납품기한 변경

가. 당초: 2022. 03. 02.

나. 변경: 2022. 06. 10.(증 100일)

4. 계 약 자: *********

5. 변경사유: 공사장 문화재 시굴조사 및 동절기 공사중지로 인한 공사일정 지연에 따른 관급자재 납품기한 연기

6. 귀책소재: 서울특별시 서부공원녹지사업소(지연배상금 미부과)

붙임  방침서 1부.  끝.

	서부공원녹지사업소장
주무관	이승준		기전시설팀장	윤상섭		시설과장	임종훈		서부공원녹지사업소장	02/25 이용남
협조자	재무팀장	정미숙
시행	시설과-1369	(		)	접수		(		)
우	03901	서울특별시 마포구 월드컵로 243	/	http://worldcuppark.seoul.go.kr
전화	02-300-5562	/전송	02-300-5569	/		/	부분공개(5)