“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	용역 준공기한 변경계약 의뢰

1. 서북권사업과-899(2019.1.29.)호와 관련 입니다.

2. 현재 시행중에 있는 ｢지역거점 발전전략 수립(명칭변경: 지역거점 발전   계획)」용역에 대하여 다음과 같이 준공기한 변경계약을 의뢰하오니 조치  하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

1) 용 역 명: ｢지역거점 발전전략 수립용역｣

2) 계약상대자: ****************

3) 계약금액: 542,500,000원

- (1차년도) 365,100,000원  (2차년도) 177,400,000원

나. 준공기한 연기내역

1) 변경내역 : 준공기한 연기(120일)

구 분		기 정	변 경	비 고
계약 금액	총차	542,500,000원	542,500,000원	변경 없음
	1차	365,100,000원	365,100,000원	변경 없음
	2차	177,400,000원	177,400,000원	변경 없음
과업 기간	총차	2017.11. 9. ~ 2019. 8.29	2017.11. 9. ~ 2019.12.27	증 120일
	1차	2017.11. 9. ~ 2019. 2.6	2017.11. 9. ~ 2019. 6. 6	증 120일
	2차	2019. 2. 7. ~ 2019. 8.29	2019. 6. 7. ~ 2019. 12.27	-

2) 연기사유 : 붙임 ‘준공기한 연기의뢰서’ 참조

붙임  1. 방침서(용역 준공기한 연기 검토보고서) 1부.

2. 용역 준공기한 연기의뢰서 1부.

3. 관련공문(과업연기원 및 합의각서) 각 1부.  끝.

	서북권사업과장
주무관	전수미		개발관리팀장	박해일		서북권사업과장	01/29 한휘진
협조자
시행	서북권사업과-900	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동96)프리미어플레이스빌딩 4층	/	http://citybuild.seoul.go.kr/
전화		/전송	02-2133-0734	/		/	부분공개(5)