문서번호	토목부-2963
결재일자	2022. 2. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목설계과장	토목부장
이동섭		한병찬	02/23 代김태중
협조

녹번천 복개 철거 및 복원사업 기본 및 실시설계

1차 용역 준공 및 2차 용역 발주계획 보고

2022. 02

도시기반시설본부

(토 목 부)

녹번천 복개 철거 및 복원사업 기본 및 실시설계

1차 용역 준공 및 2차 용역 발주계획 보고

우리 부에서 시행중인 ‘녹번천 복개철거 및 복원사업 기본 및 실시설계’와 관련하여 1차분 계약이 준공됨에 따라 총차 계약범위 내 2차분 용역을 발주하여 사업 추진에 만전을 기하고자 함.

1		용역개요

○ 용 역 명 : 녹번천 복개철거 및 복원사업 기본 및 실시설계

○ 용역규모 : 복개 하천 복원 (폭 15m, 연장 750m)

- 복개 구조물 철거 및 진흥로 축소 (6→4차로)

- 호안 정비, 유지용수 관로, 산책로 및 자전거도로 설치, 벽천 등 친수공간 조성

- 하천 횡단 소교량(2개소) 및 보행교(1개소) 신설 등

○ 용역기간 : ‘21.5.26 ~ ‘22.12.31 (1차 : ‘21.5.26 ~ ‘22.2.28)

○ 용 역 비 : 1,356,938천원 (1차 : 400,000천원)

○ 용 역 사 : ㈜유신 외 2개사

2		추진경위

○ ‘21. 01. 27.    : 사업시행 의뢰(하천관리과→도기본)

○ ‘21. 06. 01.    : 용역 착수

○ ‘21. 07. 30.    : 용역 착수보고

○ ‘21. 08월~12월 : 복개 현황조사, 측량, 교통분석, 수리·구조검토

○ ‘22. 01월~02월 : 녹번천 복원계획(안) 기본설계(토질조사 수행중)

3		1차분(기본설계) 주요 추진실적(전체공정률 약42%)

○ 복개구조물 철거(6련→2련)에 따른 구조안전성 검토

- 도로 양측 존치되는 기존 Box 구조물에 대한 보수·보강 방안 검토

○ 치수 안전성 확보를 위한 수리·수문 검토 수행

○ 기존 교통량 현황 분석 및 공사중 예상되는 교통 서비스 수준 검토

○ 하천 유지용수의 원활한 공급을 위한 불광천 용수관로 펌프용량 검토

○ 여유고를 고려한 횡단 교량 신설방안 검토

○ 하천 이용 시민 편의를 위한 녹번천~불광천 연결 동선 확보방안 검토

○ 구간별 하천 복원 컨셉 및 조경 등 기본설계 디자인 검토

4		1차 용역 준공 및 2차 용역 발주계획

○ 용역 계약 현황

구 분	총 차	1차(준공)	2차(금회)	비고
계약금액 (천원)	1,356,938	400,000 (‘21 이월예산)	956,938 (‘22 본예산)
계약기간	‘21.5.26 ~ ‘22.12.31	‘21.5.26 ~ ‘22.02.28	‘22.03.01 ~ ‘22.12.31

○ 금회(2차) 주요 추진사항

- 기본설계(안) 확정(하천관리과 및 은평구 협의, 시의회 보고, 주민설명회 등)

- 실시설계 수행(설계VE, 지역수자원위원회심의, 디자인심의 등 행정절차 이행)

○ 추진일정(안)

- ‘22. 02. 23 : 용역계약(2차) 의뢰 (토목부 → 총무부)

- ‘22. 02. 28 : 1차분 용역 준공계 접수

- ‘22. 03. 01 : 2차분 용역 착수

○ 조치의견

- 상기 보고 내용과 같이 녹번천 복개철거 및 복원사업 기본 및 실시설계용역 계약 1차분 준공 및 2차분 발주하여 사업 추진에 만전을 기하고자 함.

5		향후계획

○ 2022. 03. : 토질조사, 기본설계(안) 협의(하천관리과)

○ 2022. 04.~06. : 설계VE, 자문회의, 주민설명회, 실시설계 착수

○ 2022. 07.~09. : 경관심의, 지역수자원위원회 심의, 환경청 협의 등

○ 2022. 10. : 건설기술심의

○ 2022. 12. : 용역 준공

붙 임  설계내역서(2차계약분) 1부.  끝.